서울특별시고시 제0000-000호

도시계획시설(문화시설) 실시계획(변경)

1. 서울특별시고시 제2010-65호(2010.2.25)로 도시관리계획(『돈화문로 제1종지구단위계획』구역 및 계획 변경(재정비) 결정) 결정 및 지형도면 고시되고, 서울특별시 고시 제2010-295호(2010.8.19)로 도시계획시설사업 실시계획 고시된 『궁중생활사디지털전시관』 사업에 대하여,

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은법 시행령 제97조의 규정에 의거 도시계획시설(문화시설)사업 실시계획을 변경 작성하고, 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조의 규정에 의하여 다음과 같이 고시합니다.

2017년 12월   일

서 울 특 별 시 장

가. 사업의 종류 및 명칭 <사업의 명칭 변경>

○ 사업의 종류 : 도시계획시설(문화시설)사업

○ 사업의 명칭 : 궁중생활사디지털전시관 건립 → 돈화문민요박물관 건립

나. 사업시행 위치 <합지로 인한 필지 변경>

○ 서울특별시 종로구 와룡동 5-9외 2필지 → 종로구 와룡동 5-9외 1필지

다. 사업의 규모 <연면적변경>

○ 부지 면적 : 908.2㎡(건축면적:240㎡) → 854.13㎡(건축면적 : 231.63㎡)

○ 건축 규모 : 지상1층, 지하2층(연면적 : 1,487.17㎡) → (연면적 : 1,384.82㎡)

라. 사업 시행자의 성명 및 주소 <변경없음>

○ 주 소 : 서울특별시 중구 서소문동 37

○ 성 명 : 서울특별시장

마. 사업의 착수 및 준공예정일 : 실시계획일로부터 2019년 7월까지 <변경>

바. 수용 또는 사용할 토지, 지번, 지목 및 소유권외의 권리의 명세 : <지번변경> (와룡동 5-10번지 와룡동 5-9로 합지(편입)), 소유권외의 권리 명세 변동 없음

사. 변경사유 : 사업의 명칭 변경(건립계획의 변경), 필지 변경(부지 합지에 따른 변경), 부지 면적 변경(율곡로 도로구조 개선공사에 따른 면적 감소), 연면적변경(실시설계 변경), 사업기간연장(공사계약 계획 반영)

아. 기타 자세한 사항은 서울특별시 박물관과(☎2133-4198)로 문의하시기 바랍니다.