	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인 ‘국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계-잔여구간) 기본 및 실시설계용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계-잔여구간)
기본 및 실시설계 용역

나. 계 약 자 : ㈜유신외 1개사

다. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
준공기한	2017.12.31	2018.04.30

라. 연기사유

- 2단계 구간과 연계 시공성을 확보하고, 공사중 주민불편사항을 최소화하도록 관련기관 협의, 전문가 자문 등 추진을 위한 기간 소요

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 귀책사유 : 서울특별시

붙    임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.
2. 준공기한 연기방침서 1부.
3. 용역계약 변경합의서 1부.  끝.

	도로계획과장
전문관	김상익		민자사업팀장	정회원		도로계획과장	12/11 하종현
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로계획과-17555	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 본관 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8066	/전송	02-2133-0763	/	si3219@seoul.go.kr	/	대시민공개