문서번호	교량보수과-2770
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정상모		代정상모	05/01 김만수
협조	관리단속과장		代계기남
	주무관		홍용현

두모교 내진성능개선공사 외 1건

준공기한 변경보고

2014. 5

서부도로사업소

(교량보수과)

두모교 내진성능개선 외 1건 준공기한 변경보고

2013년 5월 착공, 시행중인 『두모교 내진성능개선공사』의 책임감리원으로부터

준공기한 변경(연기) 요청이 있어 검토 결과 및 조치계획을 보고드림

사업개요

이월사업(2건) : 두모교 내진성능개선공사, 폐기물 처리용역

사업기간

┏ 두모교 내진성능개선공사        : 2013. 4.26 ~ 2014. 5.23

┗ 두모교외 4개소 폐기물처리용역 : 2013. 6.25 ~ 2014. 6.24

사업내용

┏ 두모교 내진성능개선공사  : 받침교체 178개소, 전단키 103조, 감쇠기 17개소

┗ 두모교외 4개소 폐기물용역 : 폐아스콘 처리 7,178 ton  폐콘크리트 843 ton

도 급 비

┏ 두모교 내진성능개선공사         : 6,290,580천원

┗ 두모교 외 4개소 폐기물처리용역 : 149,476천원

도 급 자

┏ 두모교 내진성능개선공사        : ㈜매일종합건설  대표 김진철

┗ 두모교 외 4개소 폐기물처리용역 : (주)흥진환경 대표 임홍락

책임감리 : ㈜신명건설기술공사

내진성능개선공사 및 폐기물처리용역 추진현황

< 두모교 내진성능개선공사 >

면진받침 교체 : 총 178개소 중 완료 111개소

전단키 설치   : 총 103개소 중 완료 28개소

※ 공정률 : 66.6 % (2014. 4. 30 현재)

< 두모교 외 4개소 폐기물처리용역 >

폐기물 처리실적 : 125,261천원 (공정률 83.8 % ; 2014. 4. 30 현재)

잔여과업 : 두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선의 폐기물처리 (2013이월)

검토내용

두모교 내진성능개선공사의 준공기한 변경요청 (책임감리)

준공기한 변경(연기)사유 및 산출근거

연기 사유

- 동절기 공사 중지에 따른 공기 부족

- 하상구간 교각에 바지선 접근(자재 및 인원)을 위한 수중 터파기 공종 추가

- 안전점검통로 설치에 따른 공사기간 추가 소요

추가 공사기간 (100일)

- 동절기 공사중지 기간 : 42일 (공사중지 2014. 1.18 ~ 2014. 2.28)

- 바지선 운행을 위한 수중터파기 작업 : 56일

□ 중랑천 횡단구간 : 21일 (교각 7개소 × 3일/개소당)

□ 한강본류(하상)구간 : 35일 (교각 35개소 × 1일/개소당)

- 안전점검통로 설치 : 20일 (교각 4개소 × 5일/개소당)

⇒ 추가 공사기간 : 총 118일 (42일 + 56일 + 20일)

(일부 공종은 병행시공 가능하여 100일 적용)

⇒ 5월 23일 (당초 준공일) ＋ 100일 (공기부족) = 8월 31일 (변경기한)

준공기한 변경(연기)

┏ 두모교 내진성능개선 : 2013. 4.26. ~ 2014. 5.23 ⇒ 2013.4.26 ~ 2014. 8.31

┗ 폐기물 처리용역     : 2013. 6.25 ~ 2014. 6.24 ⇒ 2013. 6.25 ~ 2014. 8.31

조치계획

동절기 안전사고 방지를 위해 공사를 중단한 바 있고, 공사중 안전사고 방지 및 시설물 안전관리를 위한 점검통로 설치가 필요하며

2010년 실시설계 이후, 현재까지 하상 구간에 토사 퇴적량 증가로

하천 구간의 바지선 운행을 위해서는 수중 터파기가 필요한 점

공사장 안전과 품질 적정성을 확보하기 위해 공사기간이 추가 필요

한 바, 준공기한 연장 타당성이 인정되기에  책임감리원의 준공기한

연기요청을 승인하고

“두모교 내진성능개선공사”의 준공기한 연기에 따른 폐기물 처리기한을 과업대상(두모교 내진성능개선)의 완료일로 직권조정(연장)코자 함

사 업 명	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
두모교 내진성능 개선공사	2013.4.26 ~ 2014.5.23	2013.4.26 ~ 2014.8.31	지체상금 미부과 (기한연장 요구)
두모교 외 4개소 폐기물 처리용역	2013.6.25 ~ 2014.6.24	2013.6.25 ~ 2014.8.31	지체상금 미부과 (직권 연장)

따로붙임 : 준공기한 변경 요청서 (책임감리) 1부.  끝.