투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남서울경전철(주) 대표 박성윤 귀하
(경유)
제목	신림선 도시철도 민간투자사업 전체 공정 및 차기년도 예정 공정표 보완 지시

1. 남서울 2017-889(2017.12.28.)호와 관련입니다.

2. 실시협약 제23조(공정관리)에 의거 제출한 신림선 도시철도 민간투자사업 전체 공정 및 차기년도 예정 공정표 검토한 바, 아래와 같이 일부 미비한 사항이 있어  보완지시하오니 수정 공정표를 2018. 1. 8일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 실시계획 승인 공정표 대비 지연 및 선착수된 것을 반영한 수정공정표 제출

나. Ⅲ주요 변경요청 사항중 2. 구간별 착수시점 지연 변경 사유

-예) L09정거장 지연사유 (서울시와 사업시행자 변경사유 구분).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	위성환		경전철1과장	김형섭		도시철도사업부장	01/02 박동룡
협조자	경전철2과장	권영민		공정관리과장	김형건
시행	도시철도사업부-36	(		)	접수		(		)
우			/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7170	/전송	02-772-7305	/	wsh3402@seoul.go.kr	/	부분공개(7)