함께 키우는 중소기업, 함께 여는 서울의 미래
	서울산업진흥원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017 파워콘텐츠 조성(공기조형물) 설치관련 중구청 협의 등 현안보고

1. 관련

⦁ 남산 애니타운 파워콘텐츠 조성 관련 보완 요청사항 회신(애니타운팀-1633, 2017.12.06.)

⦁ 남산 애니타운 파워콘텐츠 조성 관련 협조 요청에 따른 회신(중구청 공원녹지과-20084, 2017.12.04.)

⦁ 남산 애니타운 파워콘텐츠 조성관련 협조 요청(애니타운팀-1529, 2017.11.14.)

⦁ 남산 애니타운 파워콘텐츠 조성 관련 협조 요청(서울시 문화융합경제과-6257, 2017.09.12.)

⦁ 2017 남산 애니타운 파워콘텐츠 구축 추진계획(대표이사방침 제80호, 2017.03.03.)

⦁ 2017 애니타운 조성 및 운영 사업계획(대표이사방침 제41호, 2017.02.17.)

2. 위 호와 관련하여, 명동역 소공원 파워콘텐츠 조성 추진을 위해 중구청 문화관광과 및 공원녹지과와 협의 및 협조 요청을 추진하였으나 해당 부서의 협의가 지연됨에 따른 현안 및 향후 추진계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. ‘2017 남산 애니타운 파워콘텐츠 구축사업’ 개요

〇 사  업  명 : 2017 남산 애니타운 파워콘텐츠 구축

〇 기간/장소 : 2017.6. ~ 2017.10.30. / 만화의거리 재미로 및 명동역 일대

〇 추진 내용 : 조형물, 벽화 등을 활용 재미로 파워콘텐츠 집적, 거리전시 강화 등

나. 세부추진내용

〇 공기조형물 조성 개요

- 조성위치 : 명동역 3번출구 소공원 내 쉘터

현장이미지(명동 중앙로 시점)	㈜제이벅* - 나무늘보 늘	㈜시* - 비덕

- 추진경과

‣ 중구청 담당부서(공원녹지과) 조형물 설치관련 협조를 위한 협의 중

‣ 공원내 쉘터 안전성 확보를 위한 구조검토 및 구조보강 계획 수립 완료

• 구조검토 조건 : 무게 250Kg이내, 크기 : 바닥면적 10m이내, 높이 6m이내

‣ 국내외 콘텐츠 기업모집 선정 완료 및 공기조형물 제작 예정

〇 협의내용

SBA	중구청
〇 파워콘텐츠 구축 관련 중구청 사전협의(`17.7)
‣ 문화관광과, 도로시설과, 공원녹지과, 가로환경과 ‣ 파워콘텐츠 사업계획 안내 및 사전협의 ‣ 공기조형물 설치관련 쉘터 구조검토 진행 ‣ 서울시→중구청 협조공문 발송(`17.9.24)	‣ 서울시 협조공문 요청 ‣ 공기조형물 설치 관련 쉘터 구조검토 요청(공원녹지과)
〇 명동역 소공원 공기조형물 및 지역작가 조형물 설치 협조요청 추진경과 (`17.10.24 ~ 현재)
‣ 구조검토 완료 및 구조보강 도면 완료 ‣ 구조보강 및 조형물 설치관련 협조요청(중구청 공원녹지과) ‣ 2017 파워콘텐츠 조성완료(`17.10.30) - 명동역 소공원 공기조형물 및 캐릭터 벤치 제외(협의중) ‣ 서울시 디자인정책과 협의 : 해당 사업은 국유지(공원) 내 설치하는 조형물로서 서울시 심의 대상이 아님 ※ 서울시 디자인심의 대상은 시유지내 설치 조형물, 동상, 기념비 등에 해당	‣ 공원내 조형물 설치관련 재검토 ‣ 파워콘텐츠 계획 자료 재송부 요청 및 협의 ‣ 중구청 공원녹지과 협조 주관 및 협조부서 검토 - 공원녹지과 : 설치 대상지 관리 부서로 관계부서 협조요청 - 도시디자인과 : 조형물 디자인 심의여부 검토 ⦁서울시/출연기관 사업이므로 서울시 디자인 심의 여부에 따라 결정 - 건축과 : 쉘터 구조보강 관련 검토 중 ‣ 중구청 공원녹지과 종합의견 취합 승인사항 통보 예정
(유사사례) ⦁ 송파구청 문화체육과(석촌호수 공기조형물 : 러버덕, 블루 문, 스완 등 추진) ⦁ 송파 지역에서 추진되고 있는 조형물 관련 사업은 일시 전시계획/특별 전시로 별도의 디자인 심의를 받지 않고 추진 중

다. 문제점

〇 해당 조형물은 공모를 통해 선정한 기업의 콘텐츠를 O2O 마케팅 지원하기 위하여 3개월 주기로 업데이트하여 교체 운영하기 위한 임시 설치 공기조형물로서 중구청의 협조를 통해 설치코자 하나,

〇 중구청 및 서울시의 디자인심의 여부에 대한 결정이 지연되고 있는 바,

〇 추가적인 실무협의 및 공문을 통한 결정에 따라 후속 추진코자 함

라. 항후계획

〇 설치 승인 결정시 : 구조보강 실시 및 선정기업의 콘텐츠를 1개월 이내 설치

〇 설치 불가 결정시 : 남산 일대 별도의 장소를 섭외/확정하여 대체공간에 설치

붙임문서 : 1. 남산 애니타운 파워콘텐츠 조성 관련 보완 요청사항 회신(SBA, 중구청) 각 1부.

2. 남산 애니타운 파워콘텐츠 조성관련 협조 요청(애니타운팀) 1부.

3. 남산 애니타운 파워콘텐츠 조성 관련 협조 요청(서울시) 1부.

4. 2017 남산 애니타운 파워콘텐츠 구축 추진계획 1부. 끝.

담당			팀장			본부장	전결 12/29
협조자
시행	애니타운팀-1749	(	2017.12.29.	)	접수		(		)
우	03925	서울특별시 중구 소파로 126 서울애니메이션센터	/	홈페이지 sba.seoul.kr / ani.seoul.kr
전화	02)3455-8314	/전송	02)3455-8329	/	이메일 lyj0725@sba.seoul.kr	/	공개