문서번호	설비부-349
결재일자	2018.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	01/10 권오식
협조
	경리과장		최정수

『잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

2018. 01.

『잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

‘강남역 역경사 관로 개선’공사 중 선행공종인 토목공정이 연장되어 이에 따른 전기공사 준공기한 연장에 대한 검토 보고임

1		공사개요

□  공 사 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사(3차)

□  공사내용 : 수문 및 가동보 설치, 강남역 역경사 관로 전기공사 1식

□  계약금액 : 금957,370,000원(3차, 금351,750,000원)

□  공사기간 : 13.03.26.~18.01.31.(3차, 17.11.01.~18.01.31.)

□  도 급 자 : ㈜등전전기외 1

□  공 정 율 : 92% (잠원2 빗물펌프장100% + 강남역 역경사 개선 94%)

□  감 리 사 : 책임건설사업관리기술자 배백열

2		검토근거

○ 지방자치단체 계약 및 입찰 집행기준 제13장 공사계약일반조건 제8절

(2. 계약기간의 연장)

○ 잠원2감 2018-004호(2018.01.09.) 전기공사 공기연장 검토 보고

- 토목공정 조정(준공일 02.28. ⇨ 04.30.)에 따른 전기공사 공기연장

3		검토내용

○ 변경내용

구 분	차 수	도 급 금 액	공 사 기 간	비 고
당 초	총 차	957,370,000	13.03.26.~18.01.31.
	3 차	351,750,000	17.11.01.~18.01.31.
변 경	총 차	957,370,000	13.03.26.~18.05.31.	증120일
	3 차	351,750,000	17.11.01.~18.05.31.	증120일

○ 감리검토 의견

- 토목 공사 공정이 2018.04.30.(예정)까지 연장됨에 따라 공사비 증감없이

변경된 예정공정계획에 따라 공기 연장함이 타당하다 사료됨

4		조치의견

○ 해당 내용을 검토한 결과, 관련 법령에 적합하고 건설관리책임기술자의          검토의견 대로 전기공사 준공기한을 연장함이 타당함.

붙임 : 공기연장 검토보고(예정공정표, 합의각서 포함) 1부.  끝.