문서번호	도시철도설비부-441
결재일자	2018.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
양인석	강치석	01/12 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018.01.12

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.01.12.(금)

□ 금일실적

급 전	단 전	시험시간
09 : 03	15 : 39	09:40∼14:40

○ 시험내용

- 934역 제어권 TDC 시험

○ 시운전참여인원 : 9명 (상황실 : 2명, 본부 : 명, 공사관계자 : 5명, 기관사 : 2명)

※ 급전후 차량 예열 및 점검시간 30분 필요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회사명	작업구간	작업명	작업인원	비 고
1	토목	롯데건설	934정거장	정거장 벽면 면보수	김훈희 외 7명	1.13~1.14 07:00~21:00
2	토목	포스코건설	935정거장	정거장 벽면 면보수	황태원 외 8명	1.13~1.14 07:00~17:00
3	신호	진우산전	전구간	현장정리 및 마무리 작업	윤중경 외 4명	단전후~22:00
4	기계	삼성물산	919공구	본선환기구 전선 입선	유영욱 외 6명	1.13 09:00~17:00
5	기계	대우건설	937정거장	스크린도어 센서 설치	박종근 외 8명	단전후~05:00
6	전기	삼성물산	931~ 932정거장	배관자재 운반 터널표시등 배관배선	조갑환 외 5명	1.13 08:00~17:00
7	궤도	2단계 운영사	918공구	전기모터카 시험운행	금영진 외 5명	1.13 00:45~04:00
8	궤도	2단계 운영사	918공구	전기모터카 시험운행	김종태 외 5명	1.14 00:45~04:00
9	궤도	2단계 운영사	918공구	전기모터카 시험운행	장인규 외 5명	1.15 00:45~04:00

□ 시운전차량

○ 편성번호 : 944편성

○ 주박위치 : 개화차량기지 입고

□ 기타 특이사항

○ 관제 모니터링 시스템 설치 완료(신호과)

□ 시험계획

○ `18.01.15.~`18.01.19. 934역 제어권 TDC 시험(신호시험)   끝.