문서번호	건축부-591
결재일자	2018.1.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		문화시설과장	건축부장
이진영		윤용훈	01/15 임인구
협조

『북한산성 대남문 해체·보수공사』

2차 설계용역 시행 검토보고

2018. 01

도시기반시설본부

(건 축 부)

『북한산성 대남문 해체·보수공사』

2차 설계용역 시행 검토보고

『북한산성 대성문 해체·보수공사 설계용역』과 관련하여 설계자로부터 2차 설계용역 계약 요청에 대한 검토 보고임

Ⅰ		용역개요

○ 위    치 : 종로구 구기동 산 3-1(사적 제162호)

○ 과업내용 : 대남문 육축 및 문루 전면 해체보수

- 문루부(여장하단~용마루 상단) 6.24m 해체 보수

- 육축부(지면상단~용마루 상단) 4.52m 해체 보수

○ 용역금액 : 65,768천원(1차: 62,600,000원)

○ 용역기간 : ’17.07.19~’18.03.15(1차: ’17.07.19~’18.01.14)

○ 설 계 자 : (주)예그린건축사사무소 대표 민경민

Ⅱ		용역발주 현황

구 분	계약금액(원)	용 역 기 간	비 고
총 차	65,768,000	’17.07.19∼’18. 3.15
2 차	3,168,000	’18.01.15∼’18.03.15	금회계약

Ⅲ		처리의견

○ 설계용역자로부터 제출된 계약요청 내용에 따라 2차 설계용역 발주 시행코자 함.

붙임 : 설계자 2차 설계용역 계약요청 관련서류 1부.  끝.