				★ ◎									사장 방침 제16호
문서번호	조경사업부-171			부 원			조경사업부장			마곡위례사업단장			택지사업본부장			사장
보존기간	영구																01/15
				정현도			한인철			황의필			김소겸			김세용
결재일자	2018.01.15
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역
중간보고회 시행 보고
		서울주택도시공사
( 마곡위례사업단 조경사업부 )

｢마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역｣

중간보고회 시행 보고

‘동북아 관문도시’로서의 마곡 비전을 담은 도시미술 컨셉(시범사업 모델)을  개발하고, 마곡지구 전체를 아우르는 공공미술 가이드라인 마련 및 마스터플랜 수립을 위한

『마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역』

의 중간보고회를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

Ⅰ				용 역 개 요

□ 용 역 명 : 마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역

□ 용 역 비 : 169,180,000원(부가세 포함)

□ 용역기간 : 2017.08.17. ~ 2018.02.16.

□ 용 역 사 : (사)한국도시설계학회, (사)한국공공디자인학회

□ 주요 과업 내용

가. 사업대상지 현황조사 및 분석

나. 시범사업 기획 및 추진

1) 마곡 상징 조형물 및 지역 명소화 대상지 선정

2) 사업추진 방법, 방향, 예산계획 등 종합계획 수립

다. 지역주민, 전문가, 일반시민 등 다양한 의견수렴 추진

라. 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 및 가이드라인 개발

1) 장소성을 반영한 공공미술 적용방안 기획(작품설치, 공간조성 등)

2) 조형물, 브랜드 활용 시설물 등의 가이드라인 개발

Ⅱ				추 진 현 황

□ `17.03.16. 마곡상징 브랜드(엠밸리) 홍보사업 추진 협조 요청_서남권사업과

□ `17.05.04. 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 추진 요청_서남권사업과

□ `17.07.21. 용역 재입찰 공고

□ `17.08.16. 용역 계약

□ `17.09.08. 용역 착수보고회 개최

□ `17.11.18. 용역 관련 자문위원단 구성 보고

□ `17.12.14. 공사 자체 자문위원단 자문

□ `17.12.19. 서울시 공공미술위원회 자문

□ `18.01.    공공미술 전문가 추천 요청(서울시 디자인정책과, 한국문화예술진흥위원회)

Ⅲ				중간보고회 개최(안)

□ 일    시 : 2018.01.16.(화) 16:30

□ 장    소 : 서울주택도시공사 15층 임원회의실

□ 보고내용 : 주요 중점 보고 사항 등

• 비전 체계 정립 및 방향 제시

• 마곡 공공미술 비젼 수립

• 시범사업 기획 및 추진

• 마곡지구 도시디자인 특성에 맞는 마곡공공미술 프로그램 개발

• 시범사업 대상지 선정 및 사업 진행을 위한 기획

• 마곡지구 공공미술 적용을 위한 행정, 제도, 정책 방향 수립

• 참여형 공공미술 프로그램 계획 수립

• 유관부서 및 자문회의 조치 사항

□ 참 석 자

- 우리공사 : 사장, 택지사업본부장, 마곡위례사업단장, 조경사업부장 및 관계자

- 서 울 시 : 서남권사업과장, 사업기획팀장 및 관계자

- 용 역 사 : 용역 총괄책임자 및 참여자 등

- 자문위원 : 자체 구성 자문위원단(본부장 방침 제675호_자문위원단 구성 및 운영계획 수립)

Ⅳ				향후 추진일정

□ 중간보고회 이후 용역 추진 방향에 따라 용역 수행기간 변경 검토

□ 추진일정(예정)

구 분	추진내용	일 정	비 고
1	중간보고회	2018.01.16.
2	사업기획안 도출	2018.02.	공공미술 제작설치 공모
3	공공미술 제작설치 착수	2018.03.
4	최종 보고회	2018.04.	가이드라인 개발
5	공공미술 제작설치 완료	2018.10.

Ⅴ				소 요 예 산

□ 시행 경비 : 총 2,427,000원

가. 참석자 식사비용 : 20,000원/인 x 15인 = 300,000원

나. 회의비(문구, 다과 등) : 300,000원

다. 외부 자문위원 수당 : 261,000 x 7인 = 1,827,000원

□ 예산과목 : 택지개발사업비. 기타부대비. 심사평가경비

□ 방침 수립 후 서울시 및 관계부서 회의참석 요청 공문 시행.  끝.

붙임표시