문서번호	의사담당관-300
결재일자	2018.1.22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	의정정보화팀장	의사담당관	시의회사무처장
박정규	김필래	송인상	01/22 장경환

시의회 전산실 노후 장비 교체 사업 계획

2018. 1.

서울시의회사무처

(의사담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

시의회 전산실 노후 장비 교체 사업 계획

시의회 전산실의 노후한 보안 및 부대장비를 교체하여 보다
안정적이고 효율적인 정보통신시스템을 운용하고자 함

Ⅰ. 추진배경

○ 노후 방화벽 장비(2식) 교체 등으로 최신 보안체계 구축 및 통신환경 안정화 필요

- 제조사의 보안 업데이트 서비스 종료로 새로운 해킹 기술에 취약

※ 2009, 2013년 도입 (방화벽 내용연수 5년, 조달청고시 제2016-40호)

○ 항온항습기 등 부대장비의 잦은 고장으로 정보시스템 장애발생 위험 증가

- 성능저하 및 고장으로 인해 전산장비 과부하 발생 및 전산실 보안 취약

Ⅱ. 사업개요

▢ 사 업 명 : 시의회 전산실 노후 장비 교체

▢ 사업기간 : '18. 1월 ∼ '18. 3월

▢ 사 업 비 : 115,743천원

▢ 계약방법 : 제한경쟁입찰, 조달구매

▢ 사업내용

○ 의원망 방화벽 교체 및 백본스위치 부품 구매(조달구매)	: 72,062천원

- 의원 연구실의 네트워크 보안 강화를 위한 노후 방화벽 2식 교체

- 백본스위치 안정화를 위한 관리모듈 이중화 구성

○ 전산실 노후 부대장비 교체(제한경쟁입찰, 수의계약)	: 43,681천원

- CCTV 1식 및 KVM 스위치 1식, 항온항습기 실외기 2식 구매 설치

Ⅲ. 세부 사업내용

□ 내용연수 경과 방화벽 교체 및 백본스위치 부품 이중화(조달구매)

○ 의원 연구실 네트워크 보안 강화를 위해 방화벽 2식 교체

- 최신 장비 구매 · 설치로 기존 장비의 해킹 취약점 해소

- 안정적인 운영을 위하여 방화벽 2식을 이중화 구성

		기존장비		신규장비
C P U		3.3GHz × 2Core		3.1GHz × 4Core 멀티 코어 프로세서 : 2개 이상의 프로세서(코어)를 하나의 CPU에 포함한 집적회로로 코어 수에 비례하여 성능이 향상됨.
메모리		4GB		8GB
방화벽 성능		1.2Gbps		6Gbps
도입년도		2009, 2013년		-

○ 통신환경 안정화를 위한 백본스위치 관리모듈 추가 구매 · 설치

백본 스위치 : 네트워크에서 모든 장비들의 중심적인 역할을 하는 스위치 장비로 고성능 장비를 사용함.

- 행정망 백본스위치의 안정적인 운영을 위하여 주요부품 이중화 구성

		기존부품		추가부품
C P U		700MHz × 2Core		700MHz × 2Core
플래시 메모리		512MB		1GB
패킷스위칭 용량		1.3Tbps		3.8Tbps
인터페이스		1G 8port, 10G 2port		1G 8port, 10G 2port
도입년도		2015		-

□ 전산실 노후 부대장비 교체(제한경쟁입찰, 수의계약)

○ 전산실 출입현황 및 작업상황 감시를 위한 CCTV 교체(제한경쟁입찰)

- 돔형식 카메라 8대 운영으로 녹화 사각지대 제거(기존 4대 운영)

- 고해상도(200만 화소) 카메라 교체로 감시 기능 강화

		기존장비		신규장비
해상도		41만 화소(SD급)		200만 화소(FHD급)
카메라 수		4대		8대
저장장치		250GB		6,000GB
도입년도		2007년		-

○ 서버 관리용 KVM 스위치 교체(제한경쟁입찰)

KVM 스위치 : 하나의 입출력장치(모니터, 키보드)로 여러 대의 컴퓨터 또는 서버를 관리할 수 있는 장비.

- 서버 관리를 위한 KVM 스위치 2식(거치용 책상 포함)

- 화면 떨림 방지 및 고해상도 화면 지원으로 서버관리 능률 제고

		기존장비		신규장비
지원 해상도		1,024 × 768px		1,600 × 1,200px
USB 어뎁터		32대		32대
도입년도		2007년		-

○ 항온항습기 실외기 교체(수의계약)

- 실외기 4식中 2식 고장(냉매 누수)으로 교체 및 냉매 보충

Ⅳ. 소요예산 및 추진일정

▢ 총 예산 : 115,743천원

□ 내용연수 경과 방화벽 교체 및 백본스위치 부품 이중화

○ 소요예산 : 72,062천원

- 방화벽 장비 2식	: 60,600천원

- 백본스위치 관리모듈 1식	: 11,075천원

- 조달구매 수수료 0.54%	:    387천원

※ 예산과목 : 의정담당관, 의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진, 정보화 사업,
의정 정보화 지원, 자산 및 물품 취득비

○ 계약방법 : 조달청 나라장터 구매

○ 추진일정

- 보안성 검토 실시	: '18. 1. 22. ~ 1. 26.

- 조달구매 발주	: '18. 1. 29. ~ 2.  2.

- 장비 납품 및 설치	: '18. 2.  5. ~ 2.  9.

- 테스트 및 정상 운영	: '18. 2. 12. ~

□ 전산실 노후 부대장비 교체

○ 소요예산 : 43,681천원

- CCTV            1식	: 14,762천원

- KVM 스위치      1식	: 19,195천원

- 항온항습기 실외기 2식	:  9,724천원

※ 예산과목 : 의정담당관, 의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진, 정보화 사업,
의정 정보화 지원, 자산 및 물품 취득비

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한), 수의계약

○ 입찰참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및
동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 소정의 입찰 참가자격을 갖춘 업체

-「소프트웨어산업진흥법」제24조에 의거 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) 및「정보통신공사업법」제14조에 의한 정보통신공사업 등록한 업체

-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 의한 직접생산증명서(세부품명 : 보안용카메라 또는 영상감시장치)를 소지한 업체

※ 중·소기업·소상공인 확인서는 중소기업제품 공공구매 종합정보망에서 확인 가능하여야 합니다.

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않는 업체

- 공고일 전일까지 주된 사업소가 서울특별시에 소재한 업체

※ 납품 후 장애 발생시 신속한 대처를 위하여 서울특별시에 소재한 업체로 지역 제한
(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 안전행정부 예규 1호에 의거)

○ 추진일정

- 보안성 검토 실시	: '18. 1. 22. ~ 1. 26.

- 과업지시서 작성	: '18. 1. 22. ~ 2.  2.

- 사전공개 및 입찰공고	: '18. 2.  6. ~ 2. 27.

- 사업자 선정·계약	: '18. 3.  2. ~ 3.  6.

- 사업수행	: '18. 3. 12. ~ 3. 23.

- 테스트 및 정상운영	: '18. 3. 26. ~

Ⅴ. 행정사항

○ 장비 교체 작업에 따른 네트워크 중단 사전 안내	: 각 전문위원실

○ 사업 종료 후 사용불가 장비에 대한 불용 처분	: 의정담당관

붙임	1. 시의회 네트워크 구성도 및 구입 장비내역 1부.

2. 세부산출내역 1부.

3. 가격산출근거(조달가격 및 시장조사가격) 1부.  끝.