문서번호	도시철도설비부-856
결재일자	2018.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	차량과장	도시철도설비부장
오금석	강치석	전결 01/25 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고(1/24)

2018. 01. 24.

도시철도설비부

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.01.24.(수)

□ 금일 실적

급 전	단 전	시운전 시험시간
9 : 08	17 : 00	9 : 32 ∼ 16 : 51

○ 시험내용

- 신호 TDC(선로변 설비 및 비콘 위치 확인)시험  : 938역 제어권

- TRS 무전기 송·수신 상태 점검

○ 차량탑승인원 : 11명(상황 실 : 3명, 본부 : 0명, 공사관계자 : 6명, 기관사 : 2명)

※ 급전후 차량 점검(예열 및 점검 등) 시간 : 20~30분 소요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회 사 명	작업 구간	작 업 명	작업 인원	작업 일시
1	전 기	현장전기	923공구	종점 케이블 설치	박흥호외 2명	1.24 (단전후∼23:00)
2	전 기	서울메트로 9호선 운영9(주)	927-931 정거장	전기모터카 시험운행	금영진대리외 4명	1.25 00:45∼04:00
3	신 호	진우산전	918-923공구	현장정리	윤중경외 3명	1.24 단전후~22:00

□ 시운전 전동차

○ 편성번호 : 944편성(4량) 1대

○ 주박위치 : 32k400

□ 기타 특이사항 : 없음.

□ 명일 시운전 계획

○ 시운전차량 : 4량 전동차(944편성)1대

○ 급    전 : 09:00

○ 시운전 시간 : 09:00 ~ 17:00

○ 단    전 : 18:00

○ 참 여 자 : 시운전 상황실(3명), 본부( 0명), 공사관계자(감리 등) 6명,

기관사(손일환, 이성범) 2명

○ 시험내용(신호시험) : 938역 제어권 TDC 시험.   끝.