문서번호	도시철도설비부-1221
결재일자	2018.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	차량과장	도시철도설비부장
오금석	강치석	전결 02/06 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018. 02. 05.

도시철도설비부

( 차 량 과)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.02.05.(월)

□ 금일 실적

급 전	단 전	시운전 시험시간
10 : 26	17 : 07	10: 40 ∼ 16 : 55

○ 시험내용

- 신호 TDC(선로변 설비 및 비콘 위치 확인)시험  : 931~938역 제어권

- TRS 무전기 송·수신 상태 점검

○ 차량탑승인원 : 12명(상황 실 : 3명, 본부 : 1명, 공사관계자 : 6명, 기관사 : 2명)

※ 급전후 차량 점검(예열 및 점검 등) 시간 : 20~30분 소요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회 사 명	작업 구간	작 업 명	작업 인원	작업 일시
1	이동 통신	KT한국 전파기지국	933~935 본선터널	현장 실사	이성길외 1명	2.06 (1:00∼05:00)
	기계 설비	포스코건설	935~936 전차선 선로	PSD센서조정 및 도어조정 작업	박종근외 3명	2.05 단전후 ~익일 6:00
2	전 기	서울메트로 9호선 운영9(주)	926-931 정거장	전기모터카 시험운행	금영진대리외 3명	2.05 00:45∼04:00
3	정보 통신	일광기업	931-938 본선터널	통신케이블 포설작업	봉희종외 3명	2.05 단전후~24:00

□ 시운전 전동차

○ 편성번호 : 944편성(4량) 1대

○ 주박위치 : 32k400

□ 기타 특이사항 : 없음.

□ 명일 시운전 계획

○ 시운전차량 : 4량 전동차(944편성)1대

○ 급    전 : 09:00

○ 시운전 시간 : 09:00 ~ 17:00

○ 단    전 : 18:00

○ 참 여 자 : 시운전 상황실(3명), 본부( 1명), 공사관계자(감리 등) 6명,

기관사(손일환, 이성범) 2명

○ 시험내용(신호시험) : 931~938역 제어권 TDC 시험.   끝.