문서번호	방재시설부-1618
결재일자	2018.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김상용		진재섭	02/07 이임섭
협조

국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 건설사업관리용역

1차분 준공기한 연기 검토 보고

2018. 02.

도시기반시설본부

(방재시설부)

국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 건설사업관리용역

1차분 준공기한 연기 검토 보고

본 용역 착수시기 조정에 따른「국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 1차분 준공기한 연기 검토 보고임.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 공사규모 : 연장 1.6㎞, 폭 55m(10차로), 친환경공간 15,600㎡

○ 용역기간 : ’16.10.04.~ ’20.06.03.(1차분 : ’16.10.04.~’18.02.06.)

○ 용 역 비 : 3,179,000천원(1차분 : 1,000,000천원)

※ ’16년 예산 10억원 명시이월 및 ’17년 예산 859,200천원 사고이월)

○ 계 약 자 : ㈜이산  대표 이원찬

Ⅱ		추진현황

○ ’16.08.17. : 용역 계약

○ ’16.10.04. : 용역 착수

○ ’16.10.04. : 착수일 조정 통보(기본설계 중으로 ‘16.11.01로 착수일 조정)

○ ’16.10.25. : 착수일 재조정 통보(기본설계 지연으로 ‘16.12.01로 착수일 재조정)

○ ’16.12.01. : 착수일 관련 협의

- 현재 환기ㆍ방재분야 자문추가 및 국회대로 주변 지구단위계획 수립 등으로 기본설계가 지연되고 있으므로 실 착수일 별도 통보 예정

○ ’17.03.23. : 책임건설사업관리기술자 투입 요청(‘17.04.03부터 1인 투입)

○ ’17.12.27. : 동절기 건설사업관리용역 일시정지 요청(‘18.01.01.~’18.02.28)

Ⅲ		준공기한 연기

□ 연기사유

○ 기본설계 지연으로 인한 건설사업관리용역 착수일 조정(’16.10.04 → ’17.04.03) 및 동절기로 인한 일시정지(’18.01.01.~’18.02.28)에 따라 1차분 건설사업관리용역 준공기한 연기 필요

- 1차분 용역 착수(‘17.4.3)후 책임기술자 1인 투입 중

□ 준공기한 연기(1차)

구 분	당 초	변 경	비고
용역기간	2016.10.04. ~ 2018.02.06.	2016.10.04. ~ 2018.12.31.	328일 연기
용역금액	1,000,000,000원	1,000,000,000원	변경없음

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같은 사유로 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1차) 준공기한을 연기하고, 계약부서(건설총괄부)에 변경계약 의뢰코자 함.

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.