준공(납품)기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 감독권한대행등 건설사업관리용역(1차)

나. 계약업체 : ㈜이산   대표 이원찬

다. 계약금액 : 금1,000,000,000원(금일십억원)

라. 계약년월일 : 2016. 08. 17.

마. 착수년월일 : 2016. 10. 04.

바. 준 공 기 한 : 2018. 02. 06.

2. 위 용역의 준공 기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018. 12. 31.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 기본설계 지연으로 인한 건설사업관리용역 착수일 조정(‘16.10.04. → ’17.04.03) 등 에 따른 준공기한 연기

첨부 : 연기사유 증빙자료 1부.

2018년     2월     일

담당 : 방재시설부  직급 : 시설6급  성명 : 김상용 (서명 또는 인)

과장 : 방재시설부  직급 : 시설5급  성명 : 진재섭 (서명 또는 인)

부서장 : 방재시설부  직급 : 시설4급  성명 : 이임섭 (서명 또는 인)

서울특별시 도시기반시설본부 (분임)재무관 귀하