문서번호	도시철도설비부-1470
결재일자	2018.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
양인석	강치석	02/09 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018.02.09

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.02.09.(금)

□ 금일실적

급 전	단 전	시험시간
09 : 13	17: 02	09:35∼15:40

○ 시험내용

- 931, 934역 제어권 TDC 시험

○ 시운전참여인원 : 9명 (상황실 : 2명, 본부 : 1명, 공사관계자 : 4명, 기관사 : 2명)

※ 급전후 차량 예열 및 점검시간 30분 필요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회사명	작업구간	작업명	작업인원	비 고
1	토목	삼성물산	931~933 정거장	환기구 방화문 설치	고두열 외 7명	02.10~02.11 08:00~17:00
2	토목	롯데건설	934정거장	정거장 벽면 보수	이훈희 외 3명	02.10~02.11 07:00~18:00
3	토목	포스코건설	935정거장	정거장 벽면 정리	황태원 외 3명	02.10~02.11 07:00~17:00
4	건축	삼성물산	932,933 정거장	정거장 외부 벽체판넬 마감	김승관 외 4명	02.10 07:00~18:00
5	전차선	현창전기	923공구	케이블 가선 준비작업	박흥호 외 1명	02.09 단전후~23:00
6	전기	롯데건설	920공구	소방기구 취부	박세곤 외 3명	02.10~02.11 07:00~18:00
7	통신	일광기업	931~938 정거장	통신케이블 포설	봉희종 외 3명	02.09 단전후~24:00
8	통신	현대정보 기술	931~938 정거장	광선단 확인 및 전원케이블 연결	정수봉	02.10 09:00~18:00
9	통신	현대정보 기술	930정거장	무전기 신호레벨 시험	정승준 외 1명	02.12 10:30 열차탑승 허가
10	기계	삼성물산	931, 932 정거장	본선 환기구 배관 및 입선	유영욱 외 8명	02.10 09:00~17:00
11	기계	포스코건설	935~936 정거장	PSD센서 케이블포설	박종근 외 6명	02.10~02.11 07:00~17:00
12	궤도	서울메트로 9호선운영	926~931 정거장	전기모터카 시험운행	김종태 외 3명 장인규 외 7명	02.11~02.12 00:45~04:00
13	통신	SKT 이동통신	936~937 정거장	안테나 샘플공사	신상준 외12명	02.11 09:00~18:00
14	통신	LG U+ 이동통신	935정거장	안테나 설치공사	이주완 외12명	02.09 단전후~06:00
15	통신	KT 이동통신	933~937 정거장	현장 실사	이성길 외 1명	02.10 01:00~05:00

□ 시운전차량

○ 편성번호 : 944편성

○ 주박위치 : 개화차량기지 입고

□ 기타 특이사항

○ 없음

□ 시험계획

○ `18.02.12 931~938역 제어권 TDC 시험(신호시험)   끝.