하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	용역기간 연장 시행(서울오금 공공주택지구 소음분석 및 방음시설계획 검토용역)

1. 서울오금 공공주택지구 소음분석 및 방음시설계획 검토용역의 과업기간을 다음과 같이 연장하고자 합니다.

가. 용역현황

용역명	도급자	도급액(원)	용역기간	비고
서울오금 공공주택지구 소음분석 및 방음시설계획 검토용역	주식회사 엔브이티	18,700,000원	2016.11.11.~ 2018.2.10.

나. 변경내용

○ 기간연장 : 당초 2016.11.11.~2018.2.10./변경 2016.11.11.~2018.8.10.(6개월 연장)

다. 연장사유

○ 환경보전방안검토 협의 미완료(계약상대자의 책임없는 사유)

라. 지체상금 부과여부 : 미부과. 끝.

부 원						도시환경부장				택지계획처장		02/08
		김영주						김덕근			김익성
협조자

시행			도시환경부-454				(2018.02.08)			접수				()
방침번호
우	06336			서울특별시 강남구 개포로 621								/	http://www.i-sh.co.kr
전화		02)3410-7755			전송	02)3410-7619		/	kyj0212@i-sh.co.kr					/	공개