의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-2817
결재일자	2018.2.14.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		교량건설과장	토목부장	시설국장		결재
노순재		박용택	김영수	02/14 류훈
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 170번, 유청 의원, 보건복지위원회)

① 동부간선도로 확장 및 ②동부간선도로 터널형(지붕형) 방음벽 설치사업과 관련한 유청 시의원 요구자료를 아래와 같이 제출합니다. 끝.

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	박용택
	☎ 3708-2558	주무관	노순재
	작 성 일 : 2018. 2. 13.

이곳에 본문을 입력하세요

유청 의원(보건복지위원회, 국민의당)

□ 요구번호 170

① 추진현황  ② 향후 추진계획  ③ 조감도 ④ 관련 사진

1. 동부간선도로 확장사업

2. 동부간선도로 터널형(지붕형) 방음벽 설치 사업

1		동부간선도로 확장사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 노원구 월계1교 ～ 의정부시계

○ 규    모 : 폭 4→6차로, 연장 6.85km(서울시 1.4km, 광역도로 5.45km)

- 지하차도 4개소 3,970m(초안산, 도봉, 상도, 장암), 보도육교 설치, 고가확장

○ 공사기간 : 2007.10.∼2020.12.

○ 총사업비 : 4,866억원(기투자 3,068억원, '18년 496억원, 향후예산 1,302억원)

□ 추진현황(공정률 : 현재 47.6%/ ‘18년 목표 62%)

○ 공  통

- '04.04.16 : 광역도로지정(5.45km, 국토해양부)

- '04.09.01~'07.08.17 : 기본 및 실시설계

- '07.10.17 : 1공구 공사착공(서울시 구간, 1.4km)

- '08.02.15 : 3공구 공사착공(광역구간, 2.25km)

- '08.12.30 : 2공구 공사착공(광역구간, 3.20km)

- '13.9.10/11 : 노원, 도봉구 현장시장실 운영(도봉지하차도 연장 및 방음벽 형식 변경)

- '15.07.23 : 사업계획변경조정위원회 심의 가결(도봉지하차도 연장 및 방음벽 형식 변경)

○ 1공구

- 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 착수(‘17.9.25), 7월 개통 예정

- 학여울 청구아파트 방음벽 공사(3월 착수), 지장물 이설 협의 중

○ 2공구

- 도봉지하차도(총연장 2,990m) 1,515m 완료

○ 3공구

- 상도 지하차도 서울방면(‘17.1월) 및 노원 진입램프 개통 완료(‘17.4월)

- 장암 지하차도 및 구간별 방음벽 공사 중

□ 향후계획

○ 공 통

- '18.01~03. : 총사업비조정 관련 사업계획 적정성 재검토(기획재정부)

○ 1공구

- '18.07. : 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 완료

- '18.09. : 노원구 학여울 청구아파트 방음벽 공사(803m)

- '19.01. ~ '20.12. : 초안산지하차도공사 등 개통예정

○ 2공구

- '18.01. ~ : 도봉지하차도 추가 연장구간 공사 계속(잔여 1,475m)

- '20.12. : 전 구간 개통 예정

조감도
현장사진 (창동 교차로)
현장사진 (도봉 지하차도)

○ 3공구

- '18.06. : 장암지하차도 개통 완료

- '18.12. : 단계별 방음벽 설치 완료(현대 및 상록수 아파트 앞 499m)

- '19.12. : 수락고가(190m) 및 은빛아파트(304m) 방음벽 설치 완료

- '20.12. : 차로조정구간 공사 및 사업 준공

방음벽 조감도

※ 전체 공사구간 위치도 및 조감도

2		동부간선도로 터널형 방음벽 설치사업

□ 사업개요(당초)

① 서원아파트 건너편 : 직립형 방음벽 설치완료(‘17.7월)

② 현대2차~4차 : 터널형 방음벽 설치중(L=273), ‘18.6월 완료예정

③ 하이츠 빌라 : 장대꺽기형 방음벽(L=60m, H=6+17m),  ‘18.6월 완료예정

④ 북부현대~상록수 : 터널형 방음벽 설치중(L=419m), ‘18.12 완료예정

⑤ 수락고가차도 : 장대꺽기형(L=300m) 설치중, ‘19.6 완료예정

⑥ 은빛APT ~ 수락고교 : 장대꺽기형(L=274m), ‘18.12 완료예정

⑦ 수락리버시티 : 터널형 방음벽 설치완료(‘16.12월)

□ 추진경위

○ '16.01.~'17.02. : 방음벽 실시설계 시행

○ '17.04. : 유청 시의원 의회 청원(은빛아파트 터널형 방음벽 설치요구)

○ '17.08.~ 09. : 주민설명회 3회 개최(터널형 방음벽 요청)

○ '17.08.21. : 동부간선도로 인접 도봉구 아파트 민원(삼환, 유원, 극동)

- 동부간선도로 확장 후 노원쪽만 방음벽 설치하면 도봉측 소음피해 증가 우려

○ '18.01.26. : 은빛아파트 및 수락고가 전후 터널형 방음벽 필요 검토 완료

(※ 도로계획과 종합 검토완료 및 방침 수립중)

□ 방음벽 설치 재검토(은빛 및 상록수 아파트)

○ 은빛 및 상록수 아파트에서 지속적인 터널형 방음벽 설치 요구와 함께, 건너편

도봉구(삼환, 유원, 극동, 주공) 아파트들의 소음민원 발생

○ 기존 장대꺽기형으로 설계된 방음벽은 노원측 아파트 소음예측결과 교통소음관리기준(주간 68dB, 야간 58dB)을 만족하였으나,

○ 도봉측 아파트 소음예측 결과 교통소음 관리기준을 일부 초과하여

터널형 방음벽이 필요한 것으로 검토됨

※ 인근 주공아파트 야간 60.9~64.7dB, 삼환아파트 야간 58.5~ 61.7dB ⇒ 야간소음 기준 58dB 일부 초과

□ 은빛 및 상록수 아파트 앞 방음벽 변경계획

○ 은빛아파트 앞(274m) 터널형 방음벽 설치

○ 상록수 아파트측(80m), 은빛 아파트측(30m) 터널형 방음벽 연장(110m)

- 상록수 201동(최외측) 및 은빛아파트 209동(최외측) 앞까지 연장설치

○ 수락 초,중,고 앞 하천측에 꺽기형(159m) 및 직립형(80m) 방음벽 추가 설치

※ 전구간(현대~은빛, 993m) 터널형 방음벽 설치시 추가공기 및 과다예산 소요

- 방음터널 500m이상 연장시 방재(2)등급 상향으로, 피난연결통로, 관리실,

환기팬 추가 설치 등 과다예산 소요(872억)

당초	현대,상록수 419m 수락고가 300m 은빛 274m 극동 터널형 꺽기형 삼환 주공 유원
변경	현대,상록수 499m 수락고가 190m 은빛 304m 극동 삼환 주공 유원 터널형 꺽기형 직립형 주공앞 159m 주공앞 80m

□ 향후계획

○ 도로계획과에서 방음벽 변경계획 종합방침 수립

○ 방침수립 후 설계에 반영하고 ‘19년 추가 소요예산(230억) 확보