문서번호	역사문화재과-2829
결재일자	2018.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
유지현	양지호	02/19 정영준

돈화문 교육전시장 진열장 제작 준공기한 연기 계획

2018. 2.

문화본부

(역사문화재과)

돈화문 교육전시장 진열장 제작 준공기한 연기 계획

서울시 무형문화재 돈화문 교육전시장 보수공사에 따른 진열장 제작과 관련하여 완성도 높은 제작 및 설치를 위해 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		사업명

○ 계약건명 : 서울무형문화재 돈화문 교육전시장 진열장 제작

○ 계약업체 : 주식회사 고성디자인엔지니어링(대표: 유종길)

○ 계약금액 : 금39,764,900천원(부가세 포함)

○ 계약기간 : 2017.12.26. ~ 2018.2.24.

○ 계약방법 : 수의계약

Ⅱ		변경사항

○ 변경사항 : 준공기한 연기(※계약금액 변동 없음)

당초	변경후
2017.12.26.~2018.2.24.	2017.12.26.~2018.3.15.

○ 연기사유 : 민간위탁 업체 선정이 2월에 완료되어 효과적인 전시를 위한 진열 목록 협의 진행 등에 따라 진열장 제작 및 설치의 준공 연기가 필요함

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		향후 일정

○ ‘18. 2. : 준공기한 연기의뢰(재무과)

○ ‘18. 3. : 설치 및 제작 완료.  끝.