문서번호	행정지원과-1469
결재일자	2018.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	행정지원과장	서울도서관장
최문환	이현숙	02/19 이정수

헌책보물섬 조성사업 리모델링공사 폐기물 처리용역 시행

2018. 2.

문 화 본 부

(서울도서관)

헌책보물섬 조성사업 리모델링공사 폐기물처리 용역 시행

헌책보물섬 조성사업의 리모델링공사 폐기물 처리용역을 아래와 같이 추진하고자 함

Ⅰ		사업개요

▢ 공사개요

○ 대지위치 : 송파구 오금로 1(신천유수지)

○ 건축규모 : 지상1, 층연면적 1,464.74㎡

○ 용    도 : 판매시설

○ 공사종별 : 기존 3동 건축물 리모델링 공사

○ 공사기간 : 2018. 1. ~ 7.

▢ 추진경위

○ ‘15.  9. 24. : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역

○ ‘15. 12. 30. : 헌책보물섬 조성사업 추진계획 수립

○ ‘16.  9. 30. : 실시설계 완료

○ ‘16. 11. 22. : 헌책보물섬 조성사업 변경계획

○ ‘17.  6. 16. : 투자심사(조건부)

○ ‘17. 11. 10. : 정밀안전진단 완료

○ ‘17. 12. 22. : 공사계약 체결(건축(토목,기계),전기,통신)

○ ‘18.  1. 31. : 공사착수

Ⅱ		폐기물 처리용역 발주계획

▢ 업체선정

○ 용 역 명 : 헌책보물섬 조성사업 리모델링공사 폐기물 처리용역

○ 업체선정 : 수의계약

- 근 거 : 지방계약법 시행령 제25조제 1항 제5호 나목

- 수의계약사유 : 추정가격이 2천만원 이하인 용역계약으로 수의계약을

체결하여 조속히 사업을 추진하고자 함

○ 업체자격

- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률 제21조에 따른 ‘폐기물중간처리업’과          ‘폐기물수집·운반업’ 업종을 보유한 업체

○ *******************************

▢ 예정가격 : 13,310천원

○ 실시설계용역 결과에 따른 내역서 기준

○ 예산과목 : 도서관 및 독서문화 진흥, 도서관 시설확충, 헌책보물섬 조성사업, 시설비

▢ 과업내용

○ 과업기간 : 착수일로부터 6개월

○ 과업내용 : 헌책보물섬 조성사업 리모델링공사 건설 폐기물 처리(293톤)

(세부내용 붙임 ‘과업지시서’ 참조)

Ⅲ		향후계획

▢ ‘18.  2.             : 폐기물 처리용역 수의계약

▢ ‘18.  2. ∼ ’18.  8. : 용역계약 및 시행(6개월)

붙  임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 내역서 1부.

4. 견적서 2부.

5. 수의계약 사유서 1부.

6. 사업자등록증 1부.

7. 공동수급협정서 1부.

8. 근로자권리보호이행서약서 1부.

9. 부당계약특수조건 체크리스트 1부.

10. 청렴이행계약서약서 1부.  끝.