문서번호	도시철도설비부-1801
결재일자	2018.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	02/21 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018.02.21

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.02.21.(수)

□ 금일 실적

급 전	단 전	시운전 시험시간
09 : 14	16 : 58	09:33 ∼ 16:50

○ 시험내용

- 신호 TDC(선로변 설비 및 비콘 위치 확인)시험  : 931역, 934역 제어권

- TRS 무전기 송·수신 상태 점검

○ 차량탑승인원 : 10명 (상황실 : 2명, 본부 : 0명, 공사관계자 : 6명, 기관사 : 2명)

※ 3단계 구간 주박시 급전후 차량 점검(예열 및 점검 등) 시간 : 약 20분 소요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회사명	작업구간	작업명	작업인원	비 고
1	신 호	㈜경인기술	931,934,938 정거장~관제센터	관제 연동시험	감리 전우성외 5명	2.22 01:30∼04:00
2	신 호	㈜경인기술	918~923공구	신호분야 합동점검	감리최중환외 5명	2.21 단전후∼22:00
3	통 신	㈜일광기업	931~938 정거장	본선터널 통신 케이블 포설	봉희종외 3명	2.21 단전후~24:00
4	통 신	현대정보기술	931~934 정거장	터널 선로전환기 감시케메라 설치	이태우외 3명	2.21 19:00~24:00
5	전차선	현창전기(주)	923공구	전차선 점검	박흥호외 1명	2.21 단전후~23:00

□ 시운전 전동차

○ 편성번호 : 944편성(4량) 1대

○ 주박위치 : 32K400(931정거장 부근)

□ 기타 특이사항 : 없음

□ 명일 시운전 계획

○ 시운전 차량 : 4량 전동차(944편성) 1대

○ 급       전 : 09:00

○ 시운전 시간 : 09:30 ~ 17:00

○ 단       전 : 17:05

○ 참  여  자 : 시운전 상황실(3명), 본부( 0명), 공사관계자(감리 등) 6명,

기관사(손일환, 이성범) 2명

○ 시험내용(신호시험) : 931역, 934역 제어권 TDC 시험.  끝.