문서번호	설비부-2592
결재일자	2018.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
추한영		유병기	02/27 권오식
협조

『잠원2빗물펌프장 신설공사(강남역 역경사관로 개선)』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2018. 2.

도시기반시설본부

설 비 부

『잠원2빗물펌프장 신설공사(강남역 역경사관로 개선)』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『잠원2빗물펌프장 신설공사(강남역 역경사관로 개선)』 건설사업관리자로부터 관급자재(승강기) 납품기한 연기 요청이 있어 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

규    모 : 에스컬레이터(옥외형, B 1,200, 30m/min, H7.2m) 2대

승강기(60m/min, 15인승) 1대, 건축설비 철거․설치

공사기간 : 2016.11. ~ 2018.05.31.

공 사 비 : 607백만원(에스컬레이터 256, 승강기 53 포함)

시 공 사 : 에스트건설(주)

Ⅱ		납품기한 변경

관련근거

강남역 승강기 납기일 연기요청(건설사업관리기술단, `18.2.21.)

납기변경 요청내용

변경사유 : 토목 선행공정 일정에 따라 연기

변경내용

품 명	납품요구번호	계 약 자	계약금액(원)	납 품 기 한
				당 초	변 경
승 강 기	1217204765	㈜신한엘리베이터	53,300,000	`18.2.28.	`18.5.31.

귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금 : 미부과

Ⅲ		조치의견

건설사업관리기술자의 납품기한 연기 요청내용이 적정하다고 판단되므로 건설총괄부로 납품기한 연기 의뢰하고자 함. 끝.