문서번호	설비부-3352
결재일자	2018.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	03/14 권오식
협조
	경리과장		최정수

『강남순환도시고속도로 건설 사업』

4공구 전기공사 차수조정 검토 보고

2018. 03.

『강남순환도시고속도로 건설 사업』

4공구 전기공사 차수조정 검토 보고

「강남순환도시고속도로 4공구 전기공사(3차)」에 대해 토목공사와 공정 및 예산

조정에 따른 차수조정 사항을 검토하고 보고드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 강남순환도시고속도로 4공구 전기공사(3차)

□  공사내용 : 지하차도등 155등, 가로등 3본, 트레이 2,561m, 저압반 1면 등

□  계약금액 : 금825,380,000원(총차, 금2,250,600,000원)

□  공사기간 : ’18.02.08. ~ ’19.11.30.(총차, ’10.05.25.~’19.11.30.)

□ 도 급 자 : ㈜세흥건설외 1, 대표자 홍철희

□  감 리 사 : ㈜서영엔지니어링 대표자 김종흔

2		검토근거

○ 서영강남 18-52호, 「전기공사(3차) 차수 조정 요청」 제출

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준, 제13장 공사계약 일반조건

(제7절 계약금액의 조정, 4. 그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

3		검토내용

□  차수조정 내용

구분	3 차 수		총 차
	공 사 기 간	계 약 금 액	공 사 기 간	계 약 금 액
당 초	18.02.08.~19.11.30.	825,380천원	10.05.25.~19.11.30.	2,250,600천원
변 경	18.02.08.~19.03.31.	454,180천원	10.05.25.~19.11.30.	2,250,600천원

□  공종(3차수)변경 내용

구 분	차수변경 금액 검토(원)			비 고
	당 초	변 경	증()·감(△)
가로등 전기공사	9,754,289	-	△9,754,289	차수조정 세부내용 붙임참조
조명설비공사(할증제외)	8,868,342	-	△8,868,342
조명설비공사(할증구간)	300,509,770	165,280,374	△135,229,396
트레이 및 접지공사(할증제외)	4,009,227	-	△4,009,227
트레이 및 접지공사(할증구간)	109,569,293	60,263,111	△49,306,182
지하차도 집수정 전기 설비공사	38,845,015	38,845,015	-
기타 제경비	353,824,064	189,791,500	△164,032,564
합 계	825,380,000	454,180,000	△371,200,000

□  건설사업관리기술자 검토의견

○ 강남순환도시고속도로 4공구 전기공사의 차수조정(3차)을 검토한 결과,

적정하게 반영된 것으로 판단됨

4		조치의견

○ 상기 전기공사의 3차수 조정 검토에 대한 건설사업관리기술자의 보고사항을          검토한 결과, 관련 법령에 적합하여 당해 현장의 전기공사 3차수 조정사항에          대해 건설총괄부에 계약의뢰하고자 함.

붙임  1. 차수조정 요청 공문(건설사업관리자) 1부.

2. 변경내역서(3차수 조정) 1부.

3. 예정공정표 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.