문서번호	기전설비과-2142
결재일자	2018.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
박종석	조성태	유성종		03/15 구아미
협 조
	주무관		김영준
	주무관		곽대근

2018년 상수도 태양광발전시설 설치 계획

2018. 3.

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 상수도 태양광 발전시설 설치 계획

수돗물 생산에 소요되는 동력비 절감 및 온실가스 배출량 저감을 위해 추진중인 태양광 발전시설 국비 및 시비 예산 배정이 확정되어 설치 계획을 보고 드림

□ 추진근거

◯ 본부장 방침 :『상수도 신․재생에너지(태양광)설비 확대설치 계획』

- 기전설비과-6647(2017.8.25.)호

□ 추진방법 : ① 국비지원 → ② 시비지원 → ③ 자체재원/민간투자

◯ 설치용량 : ’22년까지 34개소, 10.4MW(사업비 300억원)

- 『태양의 도시, 서울』추진에 따른 사업추진 일정 조정

◯ 사용방법 : 발전전력 자체사용

- 수돗물 생산 동력비 절감 및 온실가스배출량 저감을 위한 자체사용

◯ 1단계 : 국비 지원(지역지원) 사업으로 우선 추진(한국에너지공단)

◯ 2단계 : 국비사업에서 제외될 경우 시비 요청하여 추진(기후환경본부)

◯ 3단계 : 국비/시비 모두 제외시 자체재원 또는 민간투자 사업으로 추진

□ ’18년 사업계획

**************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

◯ 예산배정일 : (국비) ’18. 3. 16, (시비) ’18. 3. 9

□ 추진방법

◯ 사업시행 : 각 사업소별 자체 실시(강북취수장 제외)

- 원활한 사업추진 및 설치위치별 특성을 반영할 수 있는 사업소별 자체 실시

- 강북취수장은 사업소 요청에 따라 본부 기전설비과에서 설치 추진
(원수관리과-70(2018.1.17.)『2018년 지역지원사업 시행요청』호)

◯ 추진 절차

계획수립	→	설계용역	→	물품구매 및 설치공사	→	설치확인	→	발전개시

◯ 설치지침

- 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침(신재생에너지센터 공고)

- 태양광 발전시설 설치 가이드라인(서울시 공고)

- 태양광설비 설치․관리 업무 매뉴얼(서울시 지침)

□ 추진일정

◯ 2018. 3. 16. : 예산배정 완료(국비)

◯ 2018. 4. 1.  : 설계용역 실시

◯ 2018. 6. 1.  : 공사계약 및 공사착공

◯ 2018. 9. 28. : 공사준공 및 설치확인

◯ 2018. 10. 1. : 태양광 발전 개시

붙임 : 1. 예산배정 확정내시 1부.

2. 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침 1부.

3. 태양광 발전시설 설치 가이드라인 1부.

4. 태양광 설비 설치․관리 업무매뉴얼 1부.  끝.