공 사 설 명 서

1. 공 사 명: 도봉로 27길 주변 외 3개소 노후사각형거 보수공사

2. 공사목적

○ 사각형거 정밀안전점검용역 결과 콘크리트 열화, 철근노출 등 구조적 결함 및 파손 정도가 심하여 정비가 시급한 사각형거를 보수․보강하여 시설물의 내구성 향상 및 구조적 안전성을 확보함으로써 “도로함몰” 등 안전사고 예방 및 수해 예방에 만전을 기하고자 함.

3. 총공사비: 금448,300천원(도급비 429,060천원, 이전비 19,240천원)

4. 공사개요

○  사업기간: 2018. 3. ∼ 2018. 6.

○ 위    치: 송천동703-17 ~ 송천동323-19, 삼양동839-41 ~ 삼양동838-20,

삼각산동1341-12 ~ 삼양동1341-5, 수유동 238-2 ~ 수유동 238-6

○ 규    모: 사각형거 보수보강

- ▣1.0×1.0 ~ ▣1.2×1.2 L=373m, ▣1.0×1.0 L=55m, ▣1.0×1.0 L=148m, ▣1.5×1.0 L=80m

공종	규 격	단위	수 량	비 고
단면보수공	단면보수	㎡	1,241.9

6. 설계변경 조건

- 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의거 설계된 것인 바, 착공후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장의 현황에 맞추어 변경할 수 있다.

1) 물량 변경이 있을 때

2) 공법 변경이 불가피할 때

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 때

4) 단가 변경이 있을 때

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 같은법 시행령 제73조, 제74조, 제75조에 의거

5) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 사유 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

7. 공사기간 변경사항

- 본 공사 착공일은 계약일로부터 3일 이내로 하고 공사기간은 착공일로부터 120일이며 다음과 같은 경우에는 기간을 변경(연장)할 수 있다.

1) 공사시행 중 천재지변 등으로 인하여 작업이 불가능하였을 경우

2) 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

3) 지장물 철거․이설 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

4) 민원발생 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

5) 기타 특수한 사정으로 인하여 공사기간 연장이 필요한 경우

8. 기타사항

- 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술  교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

- 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고   공사를 시행하여야 하며, 착공 후 3개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

9. 예정공정표

공 종	수량	착공후 30일			착공후 60일			착공후 90일			착공후 120일			비고
단면보수공	1식
부 대 공	1식