				★차장			팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호		추모시설운영처-3332
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2018.03.16.
공개여부		공개
2018년 서울추모공원 화장로 설비 기능보강 계획
			2018. 3
						추모시설운영처

2018년 서울추모공원 화장로 설비 기능보강 계획

서울추모공원 화장로 설비의 적기 정비를 통해 안정적인 화장 업무 수행과 시설물 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

□ 화장로 시설 현황

○ 주요시설

구 분	수량	주 요 시 설 물
화장로	11	▪주연소로, 재연소로 및 주연소 버너, 재연소 버너
활성탄․소석회 공급 설비	11	▪공급시설 및 송풍기
백필터 설비	11	▪백(Bag) : 36개 (개소별)
저온촉매필터 설비	11	▪촉매필터, 암모니아 공급설비 등
백연방지 설비	11	▪열교환기 및 백연방지송풍기
배출가스감시 설비	1식	▪먼지/가스분석기, 자료수집기, 온도유량 측정계 등
운송 설비	1식	▪AGV설비, 전동대차, 수골용 컨베이어 시스템
중앙통제 설비	1식	▪중앙감시반(모니터, PC 등), 동력반, 제어반
기타 설비	1식	▪공기압축기, 분골기 등

○ 설비 계통도

□ 기능보강 계획 (외주 정비 + 자체 정비)

○ 외주 정비 : 교체주기 도래 설비의 교체·정비 및 성능 개선

구 분	정 비 내 용	단위	수량	비고
화 장 로	주연소로(턱벽돌, 세라믹모듈) 교체	대	11
	단열문 교체	대	11
	로내대차 대차블록 교체	대	11
	주연소로 내화물 부분 보수 등	대	11
배출가스 처리설비	백필터, 원심력집진기 제작 설치	대	7
	필터백 교체	대	6
	송풍기 제작 설치	대	7
	저온촉매필터 이설	대	7
	배출가스감시설비 이설	식	1
기 타	공기압축기 설치	식	1
	배출가스감시설비 이설 등	식	1

○ 자체 정비 : 화장로 주요설비의 소규모 유지보수 자체 시행

- 화장로 설비 소모성 부품 구매후 자체 교체 등 유지보수와 환경 정비 등

※ 별도 외부용역 없이 수시 정비 및 자체 보수로 기술력 향상, 전문성 확보, 예산절감 도모

각종 점검 및 유지보수
⦁각종 송풍기류 필터 교체(송풍기 등) ⦁기타 각종 설비 점검 및 유지보수

청소 및 환경정비
⦁1층 화장로 지하 PIT(재연소로)내 청소 ⦁2층 화장로 기계실 청소

○ 외주 정비 일정

구 분	2018년																										비고
	3월			4월		5월		6월			7월			8월	9월			10월			11월			12월
기능보강 (7기)																											기당 40일
			2호			3호			4호				5호		6호				7호				8호
유지보수 (11기)																											내화물정비 등
				2호			3호			4호			1호~11호

- 사업예산 : 1,728백만원(예산과목 : 구축물(수탁))

- 계약방법 : 수의계약  ※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 ①항 4호

(특허 및 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등)

□ 행정사항

○ 공단 일상감사 및 市 계약심사 : 2018. 2. 28 ~ 3. 16

○ 총무처 계약 의뢰 및 보강시행(예정) : 2018. 3. 19 ~