문서번호	물순환정책과-5391
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
담당자	토양지하수팀장	물순환정책과장
박형수	김상동	03/22 안대희

2018년 녹사평역 주변

유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
서울특별시 계약심사업무처리규칙	기술심사담당관	기술용역 타당성 심사	적정
	안전감사담당관	일상감사	적정

2018. 3.

물순환안전국

(물순환정책과)

2018년 녹사평역 주변

유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역 시행계획

녹사평역 주변 유류오염 지하수의 외곽 확산을 방지하기 위해 전문기관을 통한 오염지하수 정화 용역을 시행하고자 함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 녹사평역 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역

❍ 위    치 : 용산구 이태원동 34-2 일대(녹사평역 주변)

❍ 용역기간 : 계약일 ~ ’18. 12. 17.

❍ 용 역 비 : ************

❍ 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 지하수 및 토양오염 관리, 유류오염 정화 용역, 시설비

□ 추진현황(’18년)

❍ ’18. 1.12.  2018년 미군기지 주변 유류오염 확산방지 및 정화 추진 계획

※ ’01.1월 녹사평역 주변 유류오염 지하수 발견 후 ’03.11월부터 정화용역 수행

❍ ’18. 2.22.  기술용역 타당성 심사 요청(물순환정책과 → 기술심사담당관)

❍ ’18. 3.14.  기술용역 타당성 심사결과 통보 : 적정

❍ ’18. 3.16.  일상감사 의뢰(물순환정책과 → 안전감사담당관)

❍ ’18. 3.21.  일상감사 결과 통보 : 1인견적 수의계약 적정

□ 계약방법

❍ 계약방법 : 1인견적 수의계약

❍ 계 약 자 : **************

❍ 수의계약 근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」   시행령 제25조 제1항 제8호 사목 및 제30조 제1항

- 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우 1인견적 수의계약 가능

□ 주요 과업내용

❍ 지하수위 및 자유상유류 관측 700회(20K지역 34공 × 2~3회/월 ×9개월)

❍ 지하수시료 채취 및 오염도 분석 160점

분석대상 관측공		내 역	과업량	비고
계			160
19K 관측정	BH-24, BH-29(2공)	2공×2회(건기 1, 우기 1)	4
20K 관측정	BH-1~BH-16(16공)	35공×4회(건기 2, 우기 2)	140
	BH-34~BH-48(15공)
	BH-10-1, BH-12-1 BH-21, BH-37-1(4공)
양수정	PW-1~PW-4(4공)	4공×4회(건기 2, 우기 2)	16

- 분석항목(5개 항목) : 벤젠, 툴루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 석유계총탄화수소

❍ 자유상유류 수거 및 위탁 처리 : 20회(2공×1~2회/월×9개월)

❍ 오염지하수 양수 : 1,200톤(위탁 폐기처리)

❍ 자연저감능 평가

- 관측공(20k) 34공, 양수정 4공을 현장수질 항목(온도, 수소이온농도, 전기전도도, 산화환원전위) 및 전자수용체(용존산소, 질산염, 2가 망간, 철, 황산염) 분석을 각 4회 분석자료와 연계하여 자연저감도 평가

□ 추진일정

❍ 2018. 3.       : 용역 발주 및 계약

❍ 2018. 3.~12.17. : 용역 시행

- 2018. 7. 전문가 자문회의(용역추진 중간평가 및 자문의견 수렴)

- 2018.12. 전문가 자문회의(용역성과 최종평가 및 향후 추진방향 설정)

❍ 2018.12.17.   : 용역 준공

붙임 1. 방침서 1부.      2. 과업지시서 1부.      3. 산출내역서 1부.

4. 수의계약사유서 1부.        5. 기술용역 타당성 심사결과 1부.

6. 일상감사 의견서 1부.  끝.