문서번호	시장개선팀-475			★담당자	팀장			환경관리본부장
보존기간	년								04/03
				최김일	강성수			윤덕인
결재일자	2018.04.03
공개여부	공개
				협 조
					팀장		최영규
					부장		윤창식
				감 사
청과배송장(27.5m) 주차면 도색 등 정비 계획(안)

2018. 4

	서울특별시농수산식품공사
시장개선팀

청과배송장(27.5m) 주차면 도색 등 정비 계획(안)

청과배송장 정비를 통한 유통인 간 분쟁 해소 및 질서 확립

< 청과배송장 운영 관련 유통인대표자 합의(‘17.10.30) 사항 후속 조치 >

Ⅰ. 정비 개요

정비 일자 : 2018. 4. 7(토) ~ 4. 9(월), 3일 간

구 분	도색∙포장 공사	경계표지석 설치
정비 일자	4.7~4.8	4.9

※ 사전 정비 홍보 및 물청소 : 2018. 4. 4(수) ~ 4. 6(금)

정비 구역 : 청과배송주차장 일대(무배추경매장 측)

시공 업체 : 대균종합건설 (도색∙포장), ㈜하이큐 (경계표지석)

동원 장비 : 기동차량 2, 견인차량 1, 청소(흡입)차량 1

Ⅱ. 정비 내용

정비 총괄(도면)

세부 추진 내용

○ 중대형 화물차량 주차면 도색 : 약130면 (증감 가능)

- 배송차량이 소형에서 중대형으로 전환됨에 따라 기존 승용차 주차면을 통합하여 중대형 화물차량(8.6m×2.3m) 주차면으로 변경 도색

기 존(승용 주차면)		변 경(중대형 화물)

○ 27.5m 경계 지점 포장∙도색 : 총470m

- 경계 지점 바닥 불균형으로 아스콘 포장 후 기존 경계선(15cm)의 명확화를 위해 광폭(50cm)으로 확장 도색

기 존(폭15cm)		확 장(폭50cm)

○ 주∙야간 가시성 확보 위한 경계표지석 설치 : 총60개

- 설치 구간 : 27.5m 경계 지점 중앙 / 설치 간격 : 8m

- 설치 제품 : 쏠라 도로표지병

규 격 (mm)	가로130×세로117×높이25
재 질	알루미늄 몸체, PC렌즈
램 프	LED(청색, 황색, 백색)

Ⅲ. 인력 투입 계획

정비 인력 : 총12명

정비 일자	4/7(토)	4/8(일)
공 사(3)	부장 윤창식 이치성, 최김일	최김일
서울농수산시장관리(9)	정운배 파트장 외 8	정운배 파트장 외 8

주요 업무

○ 정비 구간 내 주∙정차 차량 이동(견인) 및 통제선 설치

○ 상품 등 적치물 정비, 청소 차량 이용 도색 구간 먼지 흡입

○ 교통 소통 근무, 차량 통제 등 도색∙포장 작업 지원

Ⅳ. 행정 사항

주차면 도색 및 포장 공사 시행∙감독 (시설안전팀)

경계표지석 설치 공사 시행∙감독 (시장개선팀)

정비 인력 및 청소차량, 견인차량 등 지원 (서울농수산시장관리)

주말 특별 근무에 따른 대체 휴무 실시 (총무팀)

○ 대 상 : 시장개선팀 윤창식(1일), 이치성(1일) / 최김일(2일)

○ 특별 근무 후 1개월 이내 대체 휴무 실시

주말 특별 근무자(총12명) 식사 제공 등 (행사운영비 사용)

끝.