투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 3단계 구간 주간(`18. 4.9 ~ 4.13)시운전 계획 송부

1. 도시철도 9호선 3단계 연장구간 개통대비 종합시운전과 관련입니다.

2. 도시철도 9호선 3단계 구간 주간 시운전 계획 및 추가 야간 열차 신호시험 계획을

아래와 같이 송부하오니 시운전 업무에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시험기간 : `18. 4. 9(월) ~ `18. 4.13(금).(토.일 제외)

나. 시운전시간 : 08:00 ~ 18:00 (시간 엄수)

다. 급단전시간 : 08시(급전), 18시00분(단전)

라. 시험구간 : 9호선 3단계 전구간(918공구 ~ 923공구)

마. 시험내용 : 신호시험[931~ 938역 고속주행(80km), 정위치 정차, 지상~

차상 연계성 시험]

바. 추가 야간 열차 신호시험 실시

○ 일    시 : 2017. 4.13.(금) 01:00~04:00

○ 내    용 : 2단계와 3단계 연결구간 신호시험

○ 참 여 자 : 시스템분야 신호감리 등, 1~2단계 운영사, 3단계 시운전상황실

○ 작업통제 : 터널내 2018.4.12. 단전후 ~ 4.13 06:00까지 작업통제(이동통신사 포함)

사. 협조사항

○ 운영사

- 전동차 지원

▫ 4량(941편성) 1대

▫ 기관사(2명) 지원, 차량정비, 청소 등 실시

▫ 시운전 차량 손상방지를 위한 바닥 보호 조치.

- 전동차 출고

▫ 기관사는 전동차 출고일 1시간전 관제센터에 필히 배차요청

▫ 4. 9(월) 09:30 개화기지 출발해서 9호선 3단계 진입

- 전동차 주박 : 시운전후 9호선 3단계 931정거장 부근(32K800)

- 전동차 입고 : `18. 4.13(금) 16:00 시운전후 개화기지로 입고

○ 차량 주박후(3단계 구간) 기관사 시운전 열차 탑승

탑승일자	탑승시간	탑승위치
4.10(화)~4.13(금)	08시	종합운동장역에서 3단계 구간으로 진입하여 탑승

○ 작업자(신호감리 등) 시운전 열차 탑승

탑승일자	탑승시간	탑승위치
4. 9(월)	10시30분	종합운동장역
4.10(화) ~ 4.13(금)	8시20분	931정거장

○ 918~923공구 책임감리원, 현장대리인 및 시스템분야 책임감리원

- 당일 07시30분까지 일일 터널안전점검 실시 결과 보고(밴드 게재)

- 야간 공사 작업시 콘크리트 천공으로 인한 잔재물이 시운전시(고속 80km                    주행) 비산먼지가 되어 차량고장 및 안전사고가 발생할 수 있음.

⇒ 원인자가 직접 물청소 실시 또는 서울시에서 원인자에게 청소비용 등을 청구 예정임.

- 터널내의 공사 자재 반출 및 승강장 가설휀스 철거.

- 당일 시운전 시간에 안전사고 방지를 위한 터널내 출입 통제와 시건장치 설치 철저.

- 터널내 2018.4.12. 단전후 ~ 4.13 06:00까지 공사 작업통제(이동통신사 포함)

- 변전소 전기안전관리자 정위치 근무 철저.

- 당일 오전에 작업승인 요청서를 팩스(449-7853)로 송부(주말은 금요일 오전).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,도시철도건축부장,서 울 특 별 시 장(교통정책과장),9호선 3단계 918~919공구 책임감리원, 현장대리인, 시스템분야 책임감리원,서울시메트로9호선(주), 서울메트로9호선운영(주), 서울9호선운영(주)
주무관	이재돈		차량과장	강치석		도시철도설비부장	전결 04/05 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-3310	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7290	/전송	772-7308	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	대시민공개