				★ ◎
문서번호	위례사업부-1237			부 원			위례사업부장				마곡위례스마트사업단장
보존기간	30년										전결	04/13
				이윤창			김주완				김익성
결재일자	2018.04.13
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
【위례택지개발지구 A1-13BL 공동주택 건설공사】
암판정위원회 개최 결과 보고
		서울주택도시공사
(도시공간사업본부 위례사업부)

암판정위원회 개최 결과 보고

위례 택지개발지구 A1-13단지 토공사(흙깍기 및 사토운반) 중 현장에서 암반이 노출되어 암판정위원회 개최 결과 서류가 건설사업책임기술자로부터 제출되어 보고드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 위례 택지개발지구 A1-13단지 공동주택 건설공사

○ 공사규모 : 아파트 13개동, 지하2층 ~ 지상22층

○ 대지면적 : 32,454㎡

○ 세 대 수 : 645세대(전용74㎡ 454세대, 84㎡ 231세대)

○ 공사기간 : 2017.11.15. ~ 2020.04.29

○ 도 급 비 : 71,970 백만원(토목분 : 4,588백만원)

○ 도 급 자 : ㈜대명건설외 1개사

○ 감 리 단 : ㈜케이디엔지서니어링 건축사 사무소

Ⅱ		현 황

○ 단지 내 외부사토를 위한 흙깍기 중 암질이 단단하다고 판단되어, 암          판정위원회 개최 후 그 결과에 따라서 공사를 시행해야 하나, 후속공정인       건축공사(파일공사)을 위하여 선공사를 시행토록 건설사업단에 지시하고,

○ 시료을 공인기관에 의뢰한 결과 리핑암(풍화암)으로 검토되어, 암 판정위원회를        개최하고 그 결과를 발주처에 제출

육안검사	시료 채취	암판정위원회 개최

Ⅲ		추진경위

○ 2017.11.15. 공사 실착공

○ 2017.12.01. 사토장변경 승인(김포매립지→고덕강일2지구/L:13.2km)

○ 2018.02.07. 추가사토장 변경승인(김포매립지→남양주시/L:34km)

○ 2018.03.~.  육안검사 실시 및 암석시료 공인기관 의뢰

○ 2018.04.09. 암판정을 위한 사전 육안검사 및 의뢰 결과 보고(건설사업단→SH)

○ 2018.04.10. 암판정위원회 개최결과 보고(건설사업단→SH)

Ⅳ		암판정 위원회 개최 결과

○ 일  시 : 2018.04.10.(화, 10:30)

○ 장  소 : A1-13BL 건설사업관리단 사무실

○ 참석자 : SH공사 차장 이윤창

사업관리단장 외 2명(기술지원감리원 포함)

시공사 소장 외 2명

○ 암판정 방법

육안검사

- 암반의 상태 : 절리가 부분적으로 발생되었고, 회백색을 띄고 있음

- 햄머타격 및 Ripperability : 반발력이 크며 유압식 리퍼로 굴착가능

실내시험

구분	기준		의뢰기관		비고
	토사	리핑암	서울시 품질시험소	한국건설 품질시험원
일축압축강도 (N/㎟)	-	60 이하	13.4 (8.7~19)	59.2 (58.4~61.6)	※ 시험성적서 중 시편 5개 시험결과 평균치
탄성파속도 (km/sec)	(0.7미만)	3.5이하 (0.7~1.2)	3.1 (2.9~3.2)	2.5 (2.4~2.6)

※ 우리공사 및 2016년도 국토교통부 국도건설공사 설계실무 요령 지침 적용

○ 검토결과

육안검사 및 실내시험을 종합적으로 검토한 결과 리핑암 이상 특성   치를 보임(개략 물량 : 6,314㎥)

Ⅴ		조치계획

○ 암판정위원회 개최 결과 리핑암으로 판정된 바, 책임건설사업관리기술자로       하여금 실정보고 토록 조치

붙임  1. 암판정위원회 개최결과 보고(CMr)

2. 시험성적서 2부.  끝.