문서번호	도시철도사업부-3838
결재일자	2018.4.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	신교통1과장	도시철도사업부장
왕태현	위성환	04/19 박동룡
협 조

- 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 -

주간공정회의 개최 결과 보고(4월3주)

2018. 4.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 -
주간공정회의 개최 결과 보고(4월3주)

별내선 1공구 건설공사의 원활한 공사추진 및 적정 공정관리를 위한  주간공정회의(4월3주)개최 결과를 보고드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘18. 04. 17.(화) 14:30~16:30

○ 장    소 : 1공구 현장사무실

○ 참 석 자 : 9명

- 본  부 : 신교통1과장, 담당주무관

- 현  장 : 책임건설사업관리기술자, 현장소장, 시공사/감리단 직원5명

□ 추진현황 보고

○ 보 고 자 : 책임건설사업관리기술자

○ 보고내용

- 파일 천공 및 근입 시공 현황

- 사토장 선정 추진 현황

- 자재 야적장 및 가적치장 확보 추진 현황

- 본선개착 1-2구간 주차구획선 폐쇄 추진 계획

□ 공정회의 결과

○ 파일 천공 및 근입 공사 적정 추진 중 (완료/계획)

- BN1 정거장(130본/233본), 본선 개착2구간(75본/105본)

※ 천공기 1대 추가 반입(4.17), 본선 1-2구간 공사 착수 예정(4.20)

□ 주요 토의내용

○ 신교통1과장

- 안전에 대한 사항을 제일로 하여 조그만한 안전사고도 발생치 않도록 현장 안전관리 철저히 기하기 바람.

- 사토장을 조속히 선정하되 가급적 현장과 근거리에 있는 사토장을여러 가지 방면으로 조사하기 바람.

- 천공 작업시에는 소음을 최대한 저감할 수 있도록 가설방음벽을 추가로 설치하고, 소음 민원에 대비하여 소음 측정을 철저히 하기 바람.

○ 책임건설사업관리기술자/현장소장

- 안전시공 10대항목 및 근로자 보호 10대항목을 준수하여 현장관리에 철저를 기하겠음.

□ 향후계획

○ 차기 공정회의시 금회 공정회의 요구사항 조치결과 보고

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 공정회의 사진 1부.

3. 공정추진 현황 1부.  끝.