준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

○ 용 역 명: 3.1운동 100주년 기념 시민공간 조성 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간: 2017. 10. 30. ～ 2018. 4. 27.

○ 계약금액: 174,000,000원

○ 계약업체: 조경설계 서안㈜

2. 준공기한 연기

○ 준공기한

- 당초: 2017. 10. 30. ~ 2018. 4. 27.

- 변경: 2017. 10. 30. ~ 2018. 5. 28.

○ 귀책사유: 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부: 미 부과

○ 연기사유

- 3.1운동 100주년 기념 삼일대로 일대 시민공간 조성사업의 대외 홍보를 위한 기자설명회(4.24) 발표에 필요한 자료 사전 준비 등으로 약 2개월이 소요되면서 계약심사 등 설계도서 검토에 필요한기간이 부족하여 준공기한을 연기하고자 함.

2018. 4.

역사도심재생과장  양 병 현 (인)

서울특별시 경리관 귀하