도시철도 9호선 3단계

종합시험운행 사전점검 점검계획

2018. 4

	철도항공안전본부 철도기술처

도시철도 9호선 3단계 종합시험운행 사전점검 점검계획

Ⅰ	목 적

○ 도시철도 9호선 3단계 구간의 사전점검에 참여하여 향후 종합시험운행 결과검토 업무를 효율적으로 수행하기 위함

Ⅱ	관련 근거

○ 철도안전법 시행령 제63조 제1항 제6의2

○ 철도종합시험운행 시행지침 제9조제5항

○ 서울시 도시철도설비부-3723(2018.4.18) 「도시철도 9호선 3단계 사전점검 계획 통보」

Ⅲ	사업 개요

○ 사업구간 : 9호선 3단계 종합운동장~보훈병원(8정거장, 9.14km)

○ 차량 편성수 : 6량 33편성, 4량 12편성 [45편성 246량]

○ 사업노선

Ⅳ	사전점검 점검계획

1. 사전점검 점검개요

○ 사전점검팀 : 도시기반시설본부, 서울메트로9호선운영

○ 점검기간 : ‘18. 05. 02(수) ~ 05. 10(목), 6일간

- 시작/종료 회의

구분	시작회의	종료회의
일시	´18. 04. 30(월), 10:30	´18. 05. 10(목), 16:00
장소	서울시 도시기반시설본부 10층(서울시 중구 청계천로 8)
내용	- 사전점검 계획 설명 ․사전점검 방법, 절차, 평가기준 ․점검결과 보고서 작성 ․안전관리방안 및 안전교육 시행 등	- 점검결과 확인(점검표) - 점검결과 보완사항에 대한 조치방안 협의 및 조정(일정, 방법 등) - 종합시험운행 시행가능 여부 판단

○ 점검항목 : 11개 분야 340 항목(사전점검반 점검표)

계	안전	운전	노반	궤도	건축	기계	송변전	전차선	전력	신호	통신
340	26	6	16	16	23	36	16	18	24	42	117

○ 점검사항

- 공종별시험결과 자료 등 확인

- 철도시설물 기능 및 성능점검

- 철도시설물 시공상태, 도면/측정자료

○ 주요 점검대상

구 분	주 요 시 설 물 현 황	비 고
토 목	- 교 량 : 없음 - 터 널 : 9.14km - 역 사 : 8개 정거장
궤 도	- 궤 도 : 19.5km - 분기기 : 23틀
건 축	- 931역(8,644㎡), 932역(6,841㎡), 933역(10,105㎡), 934역(7,833㎡), 935역(9,014㎡), 936역(8,823㎡), 937역(7,505㎡), 938역(8,986㎡)
송변전	- 수전선로(터널) : 22.7km 송배전선로 : 156.4km, 22.9kV 변전소 : 3개소 - 변전장비 130면
전차선	- 강체전차선 : 21.2km(AL T-bar)
일반전기	- 역사전기실 : 8개소, 257면(정거장 전기설비)
신 호	- 신호기계실 3개소, - 신호케이블 123.5km, 신호기 37기 - 궤도회로 114개소 선로전환기 21개
통 신	- 열차무선케이블 17.7km - 열차무선설비, 역무자동설비 전송, 방송, 영상, 열차행선안내시스템
기계설비	PSD 8개소 - 엘리베이터 : 33대 에스컬레이터 : 89대

2. 검토팀 점검일정

○ 점검기간 : ‘18. 5. 8 ~ 5. 10 (3일간)

※ 사전점검 시작/종료 회의 검토팀 참석 예정

○ 점검내용

- 사전점검 진행 현황 확인

- 분야별 공종별시험 결과 확인

- 분야별 시설물 시공(설치) 및 기능 확인 등

○ 사전점검 결과는 향후 시행하는 시행계획(기술기준) 검토 및 종합시험운행 결과검토 시 활용

3. 검토팀 구성 및 운영

○ 사전점검 검토팀 구성

구분	소속	직위	성명	비고
총괄	철도기술처	처장	김성하	04.30, 05.10
신호	철도기술처	부장	박홍규	04.30, 05.08∼10
노반	철도기술처	과장	박종우	05.08∼10
	철도기술처	과장	이상용	05.08∼10
궤도	철도기술처	과장	이주영	05.09∼10
전철전력	철도기술처	과장	이건호	04.30, 05.08∼10

※ 사전점검 일정에 분야별 검토관 참여(타사업 중복으로 인한 검토관 변경 및 일정변경 가능)

Ⅴ	철도운영자 등의 협조요청 등 제반사항

○ 사전점검에 대한 안전관리계획 철저 이행

○ 분야별 시설물 세부현황 및 공정률(향후계획 포함) 자료제공

○ 사점점검 시 분야별 담당자 참석 등