＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰 (종합운동장~잠실새내역간 송배수관정비공사 교통소통대책 수립 용역)

우리사업소에서 시행중에 있는『종합운동장~잠실새내역간외1개소 송․배수관정비공사 교통소통대책 수립 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기요청 하오니 변경계약 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 종합운동장~잠실새내역간외1개소 송․배수관정비공사 교통소통대책 수립 용역

나. 계약업체: (주) 한솔알앤디 대표 배기한

다. 계약금액: 금22,569,430원(금이천이백오십육만구천사백삼십원)

라. 준공기한 연기

당 초: 2018. 5. 3.  ► 변 경: 2018. 6. 1.

마. 귀책사항: 없음

바. 지체상금 부과여부: 미부과

사. 연기사유: 자문회의 심의(예상) 결과에 따른 승인 조건 및 보완사항 등을 처리하기 위한 절대 공기 부족

붙임: 1. 준공기한 연기 보고 1부

2. 관련공문 및 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	곽미숙		주무관	한호진		급수운영과장	04/30 김태헌
협조자
시행	급수운영과-6844	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5172	/전송	3146-5189	/	one2540@seoul.go.kr	/	대시민공개