투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 서윤석
(경유)
제 목	설계도서 검토서 및 마이크로파일 구조변경 건 승인처리

1. 중랑물재생센터 시설보수과-2345 (`18.5.9),  중랑슬관 2018-117 (`18. 5. 8. 설계도서 검토의견 최종 결과제출 및 처리요청), 중랑슬관 2018-106 (마이크로파일 구조변경건 검토서 제출 `18. 4.27.)과 관련입니다

2. 건설사업관단에서 제출한 중랑물재생센터 슬러건조시설 설치공사 설계도서 검토의견 최종 제출분과 마일크로파일 구조변경 검토서에 대하여 승인처리하니, 추후 금액 등을 확정하고 세부사항에 대하여 우리센터로 건별로 실정보고를 하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, ‘소화조 가온을 위한 보일러의 철거 및 보일로실 이사 지연’, ‘기존 전기실 운영 (보일러, 세정집진장치 송풍기, 지하공동구 배수펌프 3개, 슬러지건조동 지하 1층 기계실 내 배수펌프, 가온용 펌프 및 반류수 펌프, 유입펌프동 토출밸브, 본관동 식당 온수공급용 펌프의 전원)으로 전단벽 설치 및 바닥 1층 바닥 트렌치 평단작업 등 지연’, ‘지하 소화조 가온용 펌프 가동 중지 불가 및 ‘전기 케이블 트레이 간섭’ 등의 사유로 지연된 공사를 만회할 수 있도록 공정안전을 기반으로한 세밀한 공정계획을 수립·시행하고 우리센터로 그 계획을 ′18. 5.30.까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	윤정		주무관	안봉용		시설보수과장	전결 05/10 윤승범
협조자
시행	시설보수과-2371	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/		/	대시민공개