준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 한강안내센터 제로에너지 건축물 설계 및 에너지 최적화 기술개발 용역

나. 계약업체 : ㈜제드 건축사사무소외 1개사

다. 계약금액 및 계약기간

구 분	총 차	2차분	비 고
용역기간	’16. 8. 1∼’18. 5. 31	’17. 2. 2∼’18. 5. 31
계약금액	134,970,000원	63,030,000원

라. 계약년월일 : 2016. 8. 1

마. 착수년월일 : 2016. 8. 1

바. 준공기한   : 2018. 5. 31

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018. 7. 20

나. 연기사유 귀책소재 : 서울시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 에너지 자립과 총 소비 에너지량의 50% 이상 절감을 한강 뚝섬안내센터를 대상으로 설계, 시공후 검증을 완료하는 것이 과업내용으로

- 당초 뚝섬안내센터 리모델링 공사가 2018.5월 준공 예정이었으나, 전기 및 통신공사가 2018.6.20일로 연장되어 용역기간 내 검증이 불가하여 계약기간 연장 필요

2018년   5월     일

기후환경본부 녹색에너지과장  신 동 호 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하