문서번호	생태공원과-1115
결재일자	2018.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
이나영		최병언	05/28 김인숙
협조

실정보고사항 검토보고

[이촌지구 자연(형)호안 복원사업(2차)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『이촌지구 자연(형)호안 복원사업(2차)』

실정보고사항 검토보고

「이촌지구 자연(형)호안 복원 사업」시행중 건설사업관리자인 서울시설공단의 실정보고사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

⇒ 공사감독3처-4202(2018.05.21.)

Ⅰ				공사개요

❍ 공 사 명 : 이촌지구 자연(형)호안 복원사업

❍ 공사규모 :

- 토목 : 사석부설 25,529㎥, 아스콘포장 2,649㎡, 사토 36,882㎥

- 조경 : 식물활착매트(갈대, 물억새 등) 25,348㎡, 조경석쌓기 1,727ton

❍ 공사기간 : '17. 6. 9 ~ '18. 12. 28

❍ 도 급 비 : 3,354백만원

❍ 시 공 사 : 태흥개발(주) 대표 신현종 외 2개사

❍ 건설사업관리 : 서울시설공단(공사감독3처)

Ⅱ				보고내용

구 분	검토 사항	검토결과	비 고
우회 자전거 도로 변경 설치	▸발주청 지시안에 따라 자전거 우회 도로를 완만한 곡선으로 설치하고 교통 안전시설(차선규제봉 등)을 추가설치하여 안전사고 예방 ▸도면에는 자전거 우회도로가 있으나 내역서 수량에 누락되어있어 아스콘포장등의 수량이 증가되며, 관급자재(아스콘)의 추가구매가 필요한 실정임	▸안전시설 추가설치, 누락수량의 설계반영 및 관급자재(아스콘, #78) 추가구매 의뢰코자하는 도급사 의견이 적정한 것으로 사료됨 ▸공사 개요 ㆍ아스팔트 표층：증)960㎡ ㆍ차선규제봉 철거 및 설치：증)400개소 ㆍ폐아스콘：증)113톤 ㆍ아스콘(#78) 추가 구매량 : 증)115톤

구 분	검토 사항	검토결과	비 고
임목 및 혼합 폐기물 처리	○ 기존 호안 법면의 잡목제거 및 벌개 제근시 임목 폐기물 발생 - 임목 폐기물량 : 약 95톤 ○ 기존 호안블럭 철거시 사면보호용 건설자재(pvc종류)로 추정되는 혼합폐기물 발생 - 혼합 폐기물량 : 약140㎥ ○ 상기 발생 폐기물 처리에 대한 설계 반영이 필요한 실정임	○ 발생 폐기물에 대하여 관련면허 허가 업체로 하여금 처리토록 하고 설계 내역서에 반영코자 하는 도급사 의견이 타당한 것으로 사료됨. - 폐기물 처리단가는 3개업체 이상 견적서 검토 후 낮은금액 반영 - 정확한 수량 측정이 어려워 추후 개근 수량 정산 반영 예정

Ⅲ				개략공사비 개략공사비 증ㆍ감 현황

구 분	금 액(천원)			비고
	당 초	변경	증ㆍ감
우회자전거도로 변경 설치	-	38,742	증)38,742
임목 및 혼합 폐기물 처리	-	24,959	증)24,959
도급비 합계	-	63,683	증)63,683

Ⅳ				조치의견

❍ 상기 서울시설공단의 검토 의견과 같이 우회자전거도로 설치 및  임목·혼합 폐기물처리에 대하여 승인하고자 하며 공사비 증액부분은 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 공단 현장실정보고서 1부.  끝.