보 고 서
			담당	팀장
				05/15
문서번호	공사감독3처-4145
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2018.05.15.
공개여부	공개
제목	현장 실정사항 검토보고(폐임목 및 혼합폐기물 처리)

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 이촌지구 자연(형)호안 복원사업

나. 공사기간 : 2017.06.09. ~ 2018.12.28.

다. 도 급 액 : 금3,399,139,000원

라. 도 급 자 : 태흥개발(주) 대표 신현종 외 2개사

마. 발 주 청 : 한강사업본부 생태공원과

2. 검토내용

가. 현장 실정사항

구 분	현황 및 문제점	검토결과	비 고
임목 및 혼합 폐기물 처리	○ 기존 호안 법면의 잡목제거 및 벌개 제근시 임목 폐기물 발생 - 임목 폐기물량 : 약 95톤 ○ 기존 호안블럭 철거시 사면보호용 건설자재(pvc종류)로 추정되는 혼합폐기물 발생 - 혼합 폐기물량 : 약140㎥ ○ 상기 발생 폐기물 처리에 대한 설계 반영이 필요한 실정임	○ 발생 폐기물에 대하여 관련면허 허가 업체로 하여금 처리토록 하고 설계 내역서에 반영코자 하는 도급사 의견이 타당한 것으로 사료됨. - 폐기물 처리단가는 3개업체 이상 견적서 검토 후 낮은금액 반영 - 정확한 수량 측정이 어려워 추후 개근 수량 정산 반영 예정

3. 개략공사비(토목)

구 분	금 액(천원)			비고
	당 초	변경	증ㆍ감
도 급 비 계	-	24,959	증)24,959
공 급 가 액	-	22,690	증)22,690
부 가 세	-	2,269	증)2,269

4. 조치계획

- 상기 내용에 대해 발주처 승인을 득한 후 추후 설계변경 시행.

붙임 : 도급사 실정보고서 1부.  끝.