문서번호	서남권사업과-5219
결재일자	2018.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	서남권사업과장
박성한		김동선	06/12 김윤규
협조

인천공항철도 마곡나루역 신설

수탁사업비 지급 검토 보고

2018.  6.

인천공항철도 마곡나루역 신설

수탁사업비 지급 검토 보고

우리시와 협약을 체결하여 시행 중인 ‘인천공항철도 마곡역 신설 사업’ 과 관련하여, 수탁기관인 한국철도시설공단에서 요청한 수탁사업비 지급에 대한 검토 보고

1		관련근거

□ 인천국제공항철도 마곡역(가칭) 신설 위 · 수탁 협약서

: 서울특별시(이하 “갑”), 한국철도시설공단(이하 “을”)

***************

****************************************

********************

****************************************************************

**********************************************************************************************************************

***********************************************************

2		사업개요

□ 사 업 명 : 인청공항철도 마곡역 신설

□ 사업기간 : 2016.08. ~ 2018.12.

□ 사 업 비 : 69,700백만원(서울시 전액 수탁 : SH공사 지급)

□ 사업규모

- 철근콘크리트조 : 지하3층, 역사 : 12,388㎡, 환승통로 : 67m

- 승강장 : 상대식 7.5m × 165m × 2개소

3		수탁사업비 집행현황

□ 수탁사업비 집행계획

(단위 : 백만원)

총 금액 (계약금액)	‘15년 ~ ’18년 2분기 집행계획 금액				비고
	소 계	‘15년 ~ ’18년 1분기 집행금액	‘18년 2분기 집행계획
			기납부 금액	납부요청금액
******	******	******	*****	*****	-

※ 수탁사업비 집행률(‘15.01. ~ ‘18.05.) : 85.5%(집행금액 : 59,590백만원)

□ 수탁사업비 및 사업관리비 납부현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	제1차 (‘15.01)	제2차 (‘16.01)	제3차 (‘16.04)	제4차 (‘16.06)	제5차 (‘17.02)	제6차 (‘17.03)	제7차 (‘17.08)	제8차 (‘18.04)	제9차 (요청금액)
합 계	71,009	5,000	506	20,953	78	7,133	22,419	9,309	1,858	4,259
수 탁 사업비	69,700	5,000	497	20,065	-	7,000	22,000	9,135	1,823	4,180
사 업 관리비	1,309	-	9	382	78	133	419	174	35	79

4		검토결과

□ 위 · 수탁 협약서 제9조 및 제10조에 따라 제출된 사업비 결산자료 및 사업추진현황 등의 자료를 검토한 결과,

□ 인천공항철도 마곡나루역 신설의 공정률은 98.4%(20180.04월말 기준)

□ 총사업비 69,700백만원 중 2018년 2분기 수탁사업비 4,180백만원(기납부 : 65,520백만원)에 대한 납부요청으로

□ 납부요청금액 4,180백만원(별도. 사업관리비 : 79,545,400원)을 지급하고자함

5		행정사항

□ 위 · 수탁 협약서 제10조 제5항에 따라 총납부요청금액 4,259,545,400원(수탁사업비-4,180,000,000원, 사업관리비-79,545,400원)을 한국철도시설공단에 납부하도록 서울주택도시공사(SH공사)에 납부 요청

□ 위 · 수탁 협약서 제8조 제2항에 따라, 제15조에 따른 준공절차 종료 후 정산 시행 요청(서울시 서남권사업과 → 한국철도시설공단)

- 인천국제공항철도 마곡역사 건설협약서(2008.01.14) 제12조

· 사업을 집행함으로 소요된 사업비의 정산결과를 보고서로 작성하여 제출

- 인천국제공항철도 마곡역(가칭) 신설 위·수탁 협약서(2014.11.)

· 제 8조 제2항 : 마지막 분기별 사업비가 예납된 후에 총사업비가 조정되는 경우 제15조에 따른 준공절차가 종료된 후에 정산

· 제15조 제1항 : 본 사업의 준공절차는 “을”의 공사 및 용역관리규정 및 관련 지침과 절차에 따름

· 제15조 제2항 : 본 사업의 준공절차는 “을”의 책임 하에 “갑”이 참여하여 공동으로 이행

붙임 1. 인천공항철도 마곡역 신설 수탁사업비 및 사업관리비 납부 요청 1부.

2. 납입고지서(수탁사업비 및 사업관리비) 및 입금계좌 사본 각 1부.

3. 마곡역(마곡나루역) 신설 수탁사업비 납부관련 자료 송부 1부.

4. 마곡역(마곡나루역) 사업추진현황(2018년 2분기) 1부.

5. 마곡역 신설사업 사업비 결산(2017년) 및 2018년 사업비 집행계획(‘18.2분기) 1부.

끝.