위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경 계약 의뢰**********************공사)

1.  사회혁신담당관-5463호(2018.5.16.)호및 재무과-25318(2018.5.25.)호와 관련입니다.

2. 「***********************공사」에 대한 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 사 업 명: ********************** 공사

나. 계 약 자:  ***************

다. 변경사항

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
계약금액	48,850,000원	55,000,000원	+6,150,000원	수량등 금액변경
계약기간	2018.5.25.~6.18	2018.5.25.~6.28	+10일	추가공사로 인함
기타	변경 없음

붙임 1. 설계변경 검토 보고서 (사회혁신담당관-6491호) 1부.

2. 내역서 1부

3. 설계변경 요청 공문 및 합의각서 1부. 끝.

	사회혁신담당관
지방시설사무관대우	신현성		혁신파크조성팀장	윤영선		사회혁신담당관	06/18 마채숙
협조자	계약총괄팀장	김민완
시행	사회혁신담당관-6494	(		)	접수		(		)
우	03186	서울특별시 종로구 세종대로 110 (태평로1가) 본청 2층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6314	/전송	02-2133-0757	/		/	부분공개(4 5 6)