설 계 변 경 사 유 서

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 2018년 관내 하수구조물 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2018. 3. 26. ~ 2018. 12. 20.

다. 도 급 자 : (주)신도씨엔에이 대표 윤명노

라. 공사위치 : 관내 일원

2. 설계변경 개요

가. 설계변경 사유 : 『2018 빗물받이 확충 및 이설사업』 추진에 따른 공사 물량 증·감 반영

나. 주요 수량 증·감 대비표

구 분	당 초	변 경	증·감
빗물받이	140개소	188개소	증 48개소
횡단하수거	74개소	76개소	증 2개소
콘크리트포장	4a	9a	증 4a

다. 공사비 증·감 대비표

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	797,583,800	887,583,800	증 90,000,000
도급비	627,546,800	717,546,000	증 89,999,200
관급자재비	88,670,000	88,670,000	-
이설비	81,367,000	81,367,800	증 800

2018. 6.

확 인 자 : 안전치수과장 김 귀 용 (인)

서대문구(분임)재무관 귀하