계약심사 조정내역 및 사유서

□ 용 역 명 : 2018년 관내 하수구조물 보수공사(연간단가-설계변경)

□ 사업개요

위 치	관내 일원
용역개요	- 하수관 개량 : D300~800mm, L= 650m ⇒ L=370m 맨홀설치 35 ⇒ 28개소, 빗물받이 140 ⇒ 188개소, 횡단하수거 74 ⇒ 76개소, 콘크리트포장 4.0a ⇒ 9.0a 등
용역기간	2018.3.26. ~ 12.20.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	717,546	천원
◦ 심사금액 :	717,546	천원
◦ 절 감 액 :	0	천원
◦ 절 감 률 :	0.0	%

□ 주요 심사내용

◦ 본 공사는 기심사(감사담당관-1446, 감사담당관-1624)완료된 공사로 하수구조물 보수공사의 한 공정인 빗물받이 이설에 대한 추가예산 확보로 단순 물량변경 이외의 신규 공종 및 자재 변경 사항이 없으므로 별도 의견 없음.

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 심사금액 보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법 및 단가 등은 자체발주후 조정내용 및 사유를 명기하여 결과 송부

◦ 관급비 및 이설비는 심사제외