도시철도 9호선 3단계 종합시험운행 시행 계획(변경)

2018. 6.19

서울시도시기반시설본부

목   차

Ⅰ. 종합시험운행의 개요

1.1 목적	1

1.2 사업개요	1

1.3 시험기간	1

1.4 대상구간	2

1.5 시운전열차 종류 및 운행횟수	3

Ⅱ. 종합시험운행의 방법 및 절차

2.1 시험 항목	3

2.2 평가 및 평가기준	4

2.3 상세절차	9

Ⅲ. 종합시험운행의 상세일정

3.1 시험기간	12

3.2 상세일정	12

Ⅳ. 종합시험운행팀 구성

4.1 조직	12

4.2 임무	13

Ⅴ. 시험차량 운행계획

5.1 시험차량 종류 및 구성 등	13

5.2 시험차량 운행속도	13

5.3 시험열차 기본운행계획	14

Ⅵ. 교육훈련 계획

6.1 종합전문교육	14

6.2 분야별 전문교육 훈련	14

Ⅶ. 안전관리계획

7.1 안전관리 개요	15

7.2 안전관리 조직	16

7.3 안전관리 활동 및 이행사항	17

Ⅷ. 관계기관 협조사항 및 임무	22

도시철도 9호선 3단계 종합시험운행 시행 계획(변경)

Ⅰ		종합시험운행 개요

1.1 목적

9호선 3단계 철도시설물에 대한 안전성 및 열차운행 적합성 등을 관련법규

및 시험절차에 따라 체계적으로 검증하여 성공적으로 개통․운영하고자 함

〈관련근거〉

❍ 철도안전법 제38조 및 동법 시행규칙 제75조

❍ 철도종합시험운행 시행지침(국토교통부 고시 제2017-149호, 2017. 3.10)

❍ 9호선 3단계 종합시험운행 시행 계획 보고

(서울시도시기반시설본부 도시철도설비부-15426호, 2017.12.28.)

❍ 9호선 3단계 종합시험운행 시행계획 검토결과

(국토교통부 철도시설안전과-1607호, 2018. 6.12.)

1.2 사업개요

가. 사 업 명 : 9호선 3단계 건설공사

나. 사업기간 : 2009.12 ~2018.12

다. 사업구간 : 종합운동장역 ~ 올림픽공원역 ~ 보훈병원

라. 개통예정일 : 2018. 10월말

1.3 시험기간

구 분	기 간		주 요 내 용
시 설 물 검증시험	당초	‘18. 6. 1.∼ 7. 3. (21일)	단계별 증속운행시험 선로최고속도로 운행하면서 차량과 시설물간 인터페이스, 운행적합성 등 검증
	변경	‘18. 6.21.∼ 7.20. (22일)
영업 시운전	당초	‘18. 7.16.∼ 9.15. (62일)	운전시간, 열차운행스케줄 적정성 점검 기관사 노선숙지 등 운영요원 훈련
	변경	‘18. 8.10.∼ 9.30. (52일)

1.4 대상구간

가. 규 모 : 시스템분야 총연장 9.14㎞, 정거장  8개소(환승역 2개소)

나. 노선약도

다. 주요 시설물

구 분	주 요 시 설 물 현 황	비 고
토 목	- 터 널 : 9.14km - 역 사 : 8개 정거장
궤 도	- 궤 도 : 19.5km - 분기기 : 23틀
건 축	- 931역(8,644㎡),932역(6,841㎡), 933역(10,105㎡),934역(7,833㎡), 935역(8,848㎡),936역(8,823㎡), 937역(7,505㎡),938역(9,105㎡)
송변전	- 수전선로(터널) : 22.7km 송배전선로 : 156.4km, 22.9kV 변전소 : 3개소 - 변전장비 130면
전차선	- 강체전차선 : 21.2km(AL T-bar)
일반전기	- 역사전기실 : 8개소, 257면(정거장 전기설비)
신 호	- 신호기계실 3개소, - 신호케이블 123.5km, 신호기 37기 - 궤도회로 114개소 선로전환기 21개
통 신	- 열차무선케이블 17.7km - 열차무선설비, 역무자동설비 전송, 방송, 영상, 열차행선안내시스템
기계설비	정거장 PSD 8개소 - 엘리베이터 : 33대 에스컬레이터 : 97대

1.5 시운전열차 종류 및 운행횟수

가. 시설물검증시험

○ 시운전열차 : 전동차(4량 1편, 6량 1편성)

○ 운행횟수 : 총1,980회(4량 360회, 6량 1,620회)

나. 영업시운전

○ 시운전열차 : 전동차 37편성(4량, 6량)

○ 운행횟수 : 468회/일(일반246회,급행222회)

* 시운전열차 운행횟수는 영업시운전열차 운행계획 수립단계에서 시운전

조건 및 상황 등을 고려하여 탄력 조정․시행

* 영업시운전 열차 운행계획은 시설물검증시험 결과 보고시 철도운영자

[서울메트로9호선운영(주)]에서 영업시운전 세부 계획서를 별도 제출 예정

Ⅱ		종합시험운행의 방법 및 절차

2.1 시험항목

가. 시설물검증시험 내용

총계	선로	전철전력	신호	관제
				TTC	SCADA
92	3	5	8	66	10

※ 시험항목은 국토부 철도종합시험운행 시행지침 [별표 2] 시설물검증시험 점검항목을 준용.

나. 영업시운전 내용

총 계	운전분야	영업분야	비 고
44	21	23	0

※ 시험항목은 국토부 철도종합시험운행 시행지침 [별표 3] 영업시운전 점검항목을 준용

2.2 평가 및 판정기준

가. 평가기준

○ 시설물검증시험

시 험 항 목		시 험 내 용	시험 및 평가 기준
가. 선로시설		○ 궤도 성능시험 ○ 궤도 검측 ○ 육안검사	시설물검증 시험 절차서의 평가기준에 따른다
나. 전철 전력설비		○ 전차선 비디오 모니터링 시험 ○ 전철변전소 특성시험 ○ 전철변전소 유도장애시험 ○ 레일전위측정시험 ○ 연장급전시험
다. 신호 및 열차제어 설비		○ Global Test 시험 ○ 정위치 정차(SSP) 검증 ○ 출입문 개방 방향 확인 ○ PSD 시스템 시험 ○ 역 무정차 통과(Skip Station) 확인 ○ ATS 정차 유지(Train Hold) 확인 ○ STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화 ○ 연속진로(Fleet, Cycle) 설정 시험
라. 관제설비
1	TTC 관제설비	※ 기존 운영중인 1,2단계 시설물 사용함으로 별도의 시험 불필요 ○ 운전관제장치 설치시험 ○ 신호컴퓨터실 장치 설치시험 ○ 통신망 장치 설치시험 ○ 전원장치 인가 시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항
2	관제실과 현장설비간 Interface	○ 운전관제 설비분야 - 시스템 기능 확인 - 열차운행 제어관리 기능 확인 - 스케쥴 기능 확인 - 외부 인터페이스 기능 확인 ○ 신호설비 분야 - 신호/유지보수 콘솔 기능 확인 - 운전관제실 장비 운용시험 - 시스템별 운용상태 확인 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항

시 험 항 목		시 험 내 용	시험 및 평가 기준
3	시스템 기능 (S/W) 시험	○ TTC기본 S/W 기능시험 ○ 열차운행관리 S/W 기능시험 ○ 열차운전관리 DB 기능시험 ○ 업무지원 S/W 기능시험 ○ 기타 필요사항	시설물검증 시험 절차서의 평가기준에 따른다
4	시 스 템 제어시험	○ 역 모드 전환 제어 기능시험 ○ 선로전환기 전환 제어 기능시험 ○ 진로제어(신호기 제어 포함) 기능시험 ○ TTC, CTC(L/S)에서 열차운행 제어관리 ○ 기타 필요사항
5	스케쥴 관련 이상 유무 확인	○ 스케쥴 표시상태 확인 - 온라인 스케쥴 실행 및 변경상태 - 스케쥴 관련 인쇄상태 ○ 실적 출력상태 확인 - 열차운행실적 출력물 상태 - 각종 통계조회 및 보고서 출력상태 ○ 기타 필요사항
6	열차운행 제어상태 확 인	○ 궤도점유상태 확인 ○ 열차번호 이동기능 및 열차 번호 창 적정 유무 ○ Line-up 기능 확인 ○ 자동진로(Auto) 기능 확인 ○ 역 정보 등 표시상태(LDP/LS)확인 ○ 서버기능 확인 ○ 열차스케쥴 조정시험 ○ 열차위치 추적시험 ○ 기타 필요사항
7	관제 설비간 인터페이스 시험	○ 열차행선안내장치 시험 ○ 전차선 급․단전 표시 시험 ○ 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항
8	주전송설비	○ 각종 유니트 LED 점등상태 ○ 각종 관제회선 경로 구성 적정성 및 회선 품질상태 ○ 주요기기 이중화부 동작상태(통신선로 절체 포함) ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 통신설비(데이터, 음성) 회선 경로구성 상태 확인 ○ 관제와 현장 간 광케이블 주/예비 절체시험 ○ 기타 필요사항(전원 이중화 구성 확인)

시 험 항 목		시 험 내 용	시험 및 평가 기준
9	종합영상 설 비	○ 콘솔 및 모니터 동작상태 ○ 영상저장 및 검색기능 시험 ○ 카메라 제어 기능유무 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항(차량객실감시장치 영상표출 확인)	시설물검증 시험 절차서의 평가기준에 따른다
10	관제전화 설 비	○ 주장치, 운영장치, 유지보수장치 개별 동작 상태 ○ 음성저장 및 검색 가능유무 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항
11	열차무선 시 스 템	○ 관제실, 역사, 열차 간 통화상태 ○ 설비장애 및 통신 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항(전원 이중화 구성 확인)
12	통합교환설비	○ 가입자간 호출, 통화상태 ○ 유지보수장비 기능상태 ○ 설비장애 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항
13	통합망 관리 시 스 템	○ 통합망 관리시스템 기능상태 확인 ○ 설비별 EMS 등 기능 시험 ○ 설비별 성능관리, 장애기능 확인 ○ 기타 필요사항
14	기 타	○ 지하역사 CCTV, 화재탐지설비연동 및 경보 표출확인 ○ 관제원격방송장치 기능시험 ○ 연선전화기 시험
15	SCADA설비 기능 시험	○ 주컴퓨터 및 통신제어장치 기능 확인 ○ 원격전력 제어 기능 확인 ○ 외부 인터페이스 데이터 전송 기능 확인 ○ 운용자 및 유지보수자 콘솔기능 시험 ○ 계통반 표출기능 확인 ○ 원격제어소 장치의 자료취득 및 제어 기능 확인 ○ 단로기(차단기) 원격제어 시험 ○ 단로기(차단기) 상태에 따른 급전여부 전송시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항

▷  시설물검증시험 항목 및 절차 : 붙임 2

○ 영업시운전

가. 운전(Operation)
점검항목	시험내용	시험 및 평가 기준
운전시간	◦ 기지에서 출발역까지의 출고시간 검토 (생략) ◦ 운전매뉴얼 철도차량운전자 출고 기능검사 및 시간측정	영업시운전 시험절차서의 평가기준에 따른다
	◦ 정차역 정차시간 검토 ․ 여객취급 정차시간 산정 ․ 급행대피 시 정차시간 산정 ◦ 역 구간별 운전시분(여객100% 승차시)
	◦ 종착역 도착 후 반복시간 산정
열차운영 계획 스케줄 점검	◦ 연속열차 운행 시 최소운행시격 ◦ 열차반복 사용 시 설정된 반복시간 ◦ 역 도착선 도착 후 출발선 전선시간 ◦ 기지에서 출발역까지의 출고소요시간(생략) ◦ 영업 종료 후 기지 입고 시 소요시간(생략)
철도차량운전자 노선숙지	◦ 철도차량운전자 운행노선 인지를 위한 주․야간 숙지훈련
이례사항 대처능력 및 운행안전	◦ 운행 중 비상제동 동작 및 대처방법 ◦ 장애물 발생에 대한 처리요령 ◦ 사상사고 발생 시 처리방법 및 보고체계 ◦ 사고시 단선 운전취급에 대한 대처능력 ◦ 신호장애 발생시 대응능력 ◦ 탈선 운전사고 발생시 열차소통 방안 ◦ 열차화재시 여객대피 방안 ◦ 터널․교량 등에서 비상정차시 처리방안 ◦ 열차고장시 구원열차 및 여객유도 방안 ◦ 유관기관 출동시간 및 역할분담 등 협력체계 점검

나. 영업(Commercial Business)
점검항목	시험내용	시험 및 평가 기준
여객 접근로 및 동선	◦ 지하철, 버스, 주차장 접근로 점검 ◦ 접근노선 장애요소 파악 및 보완 ◦ 역사내 환승시설 설치 및 보완 ◦ ES, MW, 엘리베이터 점검 및 혼잡도 ◦ 장애인 이동로 확보여부 점검 ◦ Carter 이동 여부 점검	영업시운전 시험절차서의 평가기준에 따른다
여객 승하차	◦ 자동 개·집표기 작동상태 점검 ◦ 게이트 통과후 정해진 좌석 이동시간 측정(장애인 포함) ◦ 열차 정차표지 설치 확인 및 위치 조정
출발역 열차대기 시간	◦ 차내설비 점검시간 ◦ 차내 비품 공급시간 ◦ 여객 승차시간
열차정보	◦ CTC와의 열차운행관련 정보 송․수신 점검 - 급행/일반열차 속성 설정 - 열차계획 변경시 각 정비간 인터페이스 ◦ 출․도착 홈 안내게시기 표출 ◦ 자동방송장치의 방송점검
역무점검	◦ 고객안전원 배치 및 교육 ◦ 역무자동화시스템 운용 점검
여객 안전설비	◦ 계단, 에스컬레이터, 엘리베이터 전기설비 점검 ◦ 승강장 안전상의 장애요인 점검 및 방화시설 점검
안전 및 보안대책	◦ 영업운행안전관리 계획 점검 ◦ 안전 및 보안 관련 소요설비 검토 및 확보
기타 영업서비스 준비사항점검	◦ 역시설물 및 편의시설 점검 - 대합실․승강장의자, 콘코스 휴게실, 화장실, 흡연실 점검 - 환기 냉․난방 등 환경점검 - 여행정보안내기, TV, 전화 등 편의설비 적정배치 - 역무시설 및 공간 점검 - 상업 및 공공시설 점검 ◦ 열차내 비품공급체계 점검 - 차내비품 검검 및 공급시간 - 물품공급 차량 승강장 이동방안 점검

▷  영업시운전 항목 및 절차 : 붙임 4

나. 시험결과 판정기준

○ (적  합) 시험기준에 적합한 경우

○ (부적합) 시험기준에 부적합한 경우

○ (보  완) 시험기준에는 미치지 않으나, 열차안전운행에 지장이 없는 경미한 사항으로 영업개시 이전에 보완이 가능한 경우

다. 부적합사항 등의 처리

○ (부적합사항) 조치완료 후 재시험

○ (보완사항) 영업개시 이전에 조치(종합시험팀에서 확인)

* 부적합 및 보완사항은 그 기준(관련 규정, 지침 등)과 필요성 등을 쉽게 파악할 수 있도록 기록(필요한 경우 현장사진, 도면 등 첨부)

2.3 상세절차

가. 시설물검증시험

○ 시운전열차를 운행하면서 시험항목별 시험절차서에 의거 시설물과 차량간의 운행적합성, 시설물 기능·성능 등을 확인

○ 시운전 열차의 선로 최고 운행속도(80㎞/h 이하)로 시행(단, 시험항목 특성에 따라 시운전 열차속도 조정)하면서 분야별로 시설물과 차량간의 운행적합성, 시설물 기능·성능 등을 확인

* 해당 시험일 첫 왕복 25㎞/h로 운행하고, 이후 선로 최고 운행속도

○ 무선통화는 차상통화(TRS 무전기)로 한다.

○ 운전취급

- 시운전열차에 대한 진로제어 등 정거장 운전취급은 시험자(신호담당)의 통제하에 신호운전취급실(931역, 934역, 938역)에서 시공사가 실시

- 시운전열차 기관사는 시운전상황실 및 시험자(신호담당)의

통제에 따라 시운전열차 운전

- 시운전열차는 1~2단계 구간은 관제센터 관제사의 통제하에 운전하고, 3단계 구간 진입전 기관사는 3단계 시운전상황실로 무선통화(TRS 무전기)하여 급전요청·확인후 3단계 구간으로 진입한다.

○ 전차선 급단전 취급은 시운전상황실(서울시 차량과) 통제하에 각 변전소

전기안전관리자가 실시

- 전차선은 시설물검증시험 시간에 급전하고, 시험 완료후 단전 실시

○ 시작회의 및 종료회의

구 분	착수회의	종료회의
일 시	2018. 6.21. 10시 30분	2018. 7.20. 16시
장 소	시스템분야 감리단 상황실
참석자	시설물검증시험 시험자 및 지원자
회 의 내 용	- 시설물검증 시험방법, 절차 등 협의 - 안전관리방안 및 안전교육 시행 - 기타 시설물검증시험에 관한 사항	분야별 시설물검증시험결과 검토 보완사항 검토 및 조치계획 협의 - 영업시운전 시행가능 여부 판단

나. 영업시운전

○ 점검방법

- (운전분야) 시운전 열차를 운행하면서 열차시운전 시분 측정 및

열차운행체계의 적정성 및 철도종사자(기관사, 승무원 등) 업무숙달을 위한 선로 적응훈련 시행 여부 확인

* 열차 기관사 노선 숙지훈련

․ 기관사 42명

▷ 영업시운전 세부 계획서 : 붙임16

- (영업분야) 시운전열차를 운행하면서 여객접근로 및 동선, 열차정보,

여객안전설비 등 영업에 따른 안전, 편의시설 등이 적정한지 여부 확인

○ 운전취급

- 시운전열차의 운전취급은 서울메트로9호선운영(주)와 서울9호선운영(주)의 영업일정계획에 따라 서울9호선운영(주)이 시행

○ 무선통화는 차상통화(TRS 무전기)로 한다.

○ 전차선 급단전 취급

- 전차선 급단전 취급은 9호선 1단계 관제센터(SCADA)에서 시행

- 전차선은 상시 급전을 원칙으로 하고, 영업시운전 종료후 단전 실시

○ 착수회의 및 종료회의

구 분	착수회의	종료회의
일 시	2018. 8.10. 11시	2018.10. 1. 10시
장 소	개화차량기지 회의실
참석자	영업시운전 시험자 및 지원자
회 의 내 용	- 영업시운전 방법, 절차, 평가기준 등 협의 - 안전관리방안 및 안전교육 시행 - 기타 영업시운전에 관한 사항	보완사항 조치계획 등 확인 - 시운전결과 종합 및 정상 사용 개시 여부 판단

다. 시험결과 정리 및 보고

○ 시험자(분야별 총괄)는 당일 시험 종료시 시험일지에 시설물검증반은(서울시 본부, 철도운영자) 서명하고, 종합시험팀장에게 제출(서울시 본부 시험자가 일일 시험일지, 점검표, 점검증빙자료 제출)

▷ 시설물검증 시험일지 양식 : 붙임 9

○ 시험자(분야별 총괄)는 시험완료 후, 시설물검증시험 및 영업시운전 시험결과보고서(적합, 부적합, 보완)와 부적합 및 보완사항 조치계획서를 종합시험팀장에게 제출

▷ 부적합 및 보완사항 조치계획서(양식) : 붙임 5

○ 철도운영자 영업시운전 반장은 영업시운전 일일운행실적(운행횟수,

승무원 훈련현황, 장애발생현황 및 보완사항 등)을 익일 09:00까지

서울시 본부 종합시험팀장에게 보고(긴급상황 시 사안별로 전화로

우선 보고)

▷ 영업시운전 시행실적 양식 : 붙임 13

Ⅲ		종합시험운행 상세일정

3.1 시험기간

가. 시설물검증시험 : 2018. 6.21 ∼ 2018. 7.20.(22일, 토·일, 휴일 제외)

나. 영업시운전     : 2018. 8.10 ∼ 2018. 9.30.(52일, 토·일, 휴일포함)

3.2 상세일정

가. 시설물검증시험 : 붙임 12(시트1) 시설물검증시험 세부일정

나. 영업시운전     : 붙임 12(시트2) 영업시운전 세부일정

Ⅳ		종합시험운행팀 구성

4.1 조직

○ 팀장 : 도시철도설비부장

○ 구성 : - 시설물검증시험 29명(서울시 본부 19명, 서울메트로9호선

운영(주) 10명)

- 영업시운전 7명(서울9호선운영(주) 관제센터)

＊영업시운전 참여인원은 시설물검증시험 종료시 영업시운전 세부 계획서 제출

			종합시험팀
			도시철도설비부장
	시설물검증시험반							영업시운전반

* 종합시험팀 및 지원자 명단 : 붙임 3

4.2 임무

구 분	임 무
팀 장	- 시설물검증시험, 영업시운전 시행계획 수립·시행, 결과보고 등 종합관리 - 시설물검증시험 시운전열차 운행계획 수립·시행 - 시설물검증시험, 영업시운전 관련 기관별/분야별 인터페이스 협의·조정
반 장	- 철도운영자와 종합시험관련하여 협의 - 종합시험운행 참여자 교육시행 - 시설물검증시험 시운전열차 고장 및 이례사항 발생 시 정거장 운전취급자 등 관계기관 연락 및 종합시험팀장에게 보고
시험자 (분야별 총 괄)	- 시설물검증시험 시운전열차 운행 전 정거장취급자와 시운전열차 운행에 관한 협의 - 탑승자 통제, 출입문 개폐 등 운행 전 시운전열차 안전상태 확인 - 시설물검증시험 시운전열차 운행 전 급전상태 및 운행진로 확인 - 시설물검증시험 시운전열차 고장 및 이례사항 발생 시 반장에게 보고 - 시설물검증시험 및 영업시운전 시험 - 시험결과, 시설물검증시험 일지 작성/제출 - 시운전열차 지원자, 기관사에게 시험개요, 운전취급 특이사항 사전설명
지원자	- 시설물검증시험 및 영업시운전 시행시 시험자에게 현장안내, 시스템설명, 설계도서 및 각종도면 제공 등 지원

* 탑승일정 및 명단이 변경될 경우, 반장은 종합시험팀장에게 승인 요청하고 종합시험

팀장은 국토부(검토팀)에 보고.

* 시험자(분야별 총괄) : 궤도, 설비(PSD), 송변전, 전차선, 통신, 신호, 관제

Ⅴ		시험차량 운행계획

5.1 시험차량 종류 및 구성

○ 시설물검증시험 : 전동차(4량 1편성, 6량 1편성)

○ 영업시운전 : 전동차 4량 20편성, 6량 17편성

5.2 시험차량 운행속도

○ 시설물검증시험 : 선로 최고 운행속도(80km/h 이하)

* 해당일 첫 왕복만 25㎞/h로 운행하고, 이후 선로 최고 운행속도

○ 영업시운전 : 선로 최고 운행속도(80km/h 이하)

5.3 시험열차 기본운행계획

○ 시운전열차 운행, 차량 유지보수 및 관리 등은 철도운영자인 서울메트로9호선

운영(주)에서 시행

○ 영업시운전 열차 운행시각은 서울메트로9호선운영(주)에서 별도

운영처리

○ 시설물 및 열차운행체계 안정화 등 시운전열차 운행이 필요할 경우 개통 전일까지 일부 열차를 계속 운행할 수 있음

Ⅵ		교육훈련계획

6.1 종합 전문교육

○ 종합시험운행 시행계획

- 대    상 : 종합시험팀 전원

- 장    소 : 시설물검증시험 및 영업시운전 착수회의실

- 시    기 : 착수회의 시작전에 실시

- 교육내용 : 시설물검증시험 및 영업시운전 시행 전반에 일반사항

※ 기관사, 관제사 등 교육에 불참한 경우에는 철도운영자 종합시험운행 주관 부서장이 전파교육 실시

6.2 분야별 전문교육훈련

○ 교육내용 : 분야별 시험항목에 시험방법, 시험기준 등 사전숙지

○ 교육방법 : - 자가학습 : 본부/운영사 시험자간 토론식 학습

(서울시 본부 시험자가 교육 교재 준비)

- 교육시기 : 최초시험 착수전 실시

* 자가학습 시행 후 종합시험팀장에게 교육일지 및 서명부 제출

* 시험자 변경 및 휴가, 출장으로 교육에 불참한 경우는 분야별 시험자가 별도 자가학습 시행 후 시행결과를 종합시험팀장에게 제출

Ⅶ		안전관리계획

7.1 안전관리 개요

○ 안전관리 기본원칙

- 시설물검증시험 및 영업시운전열차 안전운행확보

- 분야별 시설물에 대한 안전확보

- 사고·장애 등 이례상황 발생을 대비한 비상복구체제 수립 및 신속한 대처

- 시운전열차 운행에 지장을 주는 선로작업 전면금지

- 이례사항 발생시 신속한 보고체계 확립

- 종합시험운행 시험자에 대한 안전교육 등 안전관리

○ 적용범위

- 9호선 3단계 구간의 종합시험운행 안전관리업무

․ 적용기간 : 종합시험운행 시행기간 동안

․ 적용구간 : 종합운동장∼올림픽공원역~보훈병원(9.14km)

․ 적용시간대 : 종합시운전 시간(시운전열차 운행계획에 따름)

○ 안전관리 업무범위

- 서울시도시기반시설본부

· 종합시험운행 안전관리업무 지휘, 통제, 감독

· 9호선 3단계 철도시설물 안전관리 및 작업통제

- 철도운영자

․ 시운전열차 운행관리

․ 종합시험운행구간 사고·장애 등 발생 시 사고 복구체계에 의한 조치

․ 종합시험운행에 참여하는 서울메트로9호선운영(주), 서울9호선

운영 직원(기관사, 승무원, 역무원 등)에 대한 직무사고예방

자체 교육시행

․ 영업운행구간 철도시설물 안전관리 및 작업통제

7.2 안전관리 조직

○ 안전관리 조직

구 분		종합시험운행 안전관리				철도건설현장 안전관리
안전관리 조직
		종합시험운행 안전관리책임자				안전관리책임자
		종합시험팀장				공구별 책임감리원
		종합시험운행 안전관리자				현장 안전관리자
		신호과장				현장대리인
		종합시험운행 현장 안전관리자				분야별 안전관리자
		신호담당				시공자 안전담당
안전관리 책임범위		○ 종합시험운행 안전관리 추진 ○ 종합시험운행 참여자 안전조치 및 안전교육 ○ 시설물검증시험 시운전열차 통제				○ 공구별 비상연락망 체계유지 ○ 종합시험운행 안전관리책임자 지시사항 이행

○ 안전관리자 임무

- 종합시험운행 안전관리책임자(종합시험팀장)

․ 종합시험운행 안전관리업무 총괄

- 종합시험운행 안전관리자(신호과장)

․ 종합시험운행 안전관리 추진대책 수립

․ 종합시험운행 참여자에 대한 안전교육 시행

- 종합시험운행 현장안전관리자(신호담당)

․ 종합시험운행 참여자에 대한 안전교육 시행(안전관리자 부재시)

․ 비상연락망 체계 확인, 정비

- 현장 안전관리책임자(공구별 책임감리원)

․ 철도건설 현장 안전관리 전반에 대한 총괄

- 현장 안전관리자(공구별 현장대리인)

․ 종합시험 안전관리 추진

․ 철도시설․장비의 안전확보와 안전사고 예방 관리

․ 종합시험운행 중 이례사항 발생시 신속한 안전조치를 시행

․ 정거장에 안전요원 배치관리

․ 이례사항 발생시 신속조치

- 분야별 안전관리자(공구별 시공사 안전담당)

․ 사고발생시, 보고체계에 따라 신속한 보고

․ 종합시험운행기간 중 작업을 시행한 개소의 현장점검에 따른

종합시험운행 착수전 매일 불안전 요소 제거

․ 종합시험운행자 개인보호장구 준비(안전모, 안전조끼, 안전화 등)

․ 작업인력 및 작업차량 통제 및 철도시설물 기능 확보

7.3 안전관리활동 및 이행사항

○ 안전교육 시행

- 종합시험운행 안전관리자는 시설물검증시험 및 영업시운전 팀원에

대한 안전교육 시행

․ 시운전열차 운행계획, 안전관리계획(안전관리 조직 및 임무,

비상상황에 대한 대응방법 등) 교육

* 안전교육 불참자는 안전관리자가 안전교육을 시행하고,

종합시험팀장에 보고 후 시험에 투입

- 안전관리책임자(공구별 책임감리원)는 관계직원(감리단, 시공사) 안전교육 시행

* 위험요소에 대한 확인방법 및 대책 등을 포함하여 교육시행

- 서울메트로9호선운영(주), 서울9호선운영(주) 종합시험운행 담당부서장은 TTC관제사, 기관사 등에 대한 안전교육을 시행하고, 그 결과를 종합시험팀장에게 제출

○ 시설물 위험요소 확인

- 공구별 안전관리책임자는 전차선로 상시가압에 따른 감전사고, 2~3단계

연결 구간 작업자 등 본선 시운전에 지장이 발생하지 않도록 위험요소 확인 및 관리

▷ 확인방법 및 대책 : 붙임 15

- 공구별 현장안전관리자는 매일 종합시험운행 착수 전 시운전열차의 안전운행확보를 위하여 현장시설물 상태점검 및 그 결과를 종합시험팀장에 보고

- 또한, 시운전열차 운행에 지장을 주는 사항 발생 시 원인 및 조치계획을 종합시험팀장에게 보고

○ 선로작업 및 출입통제

- 종합시험운행 시간대에 선로내 모든 작업 및 점검 금지

- 현장 안전관리자는 매일 시설물검증시험 및 영업시운전 착수 전 시운전열차의 안전운행 확보를 위해 시설물의 상태를 점검하고 그 결과를 종합시험팀장에게 보고(밴드 및 팩스 활용 등)

* 시설물안전상태 점검결과(양식) : 붙임 10

- 분야별 안전관리자는 시설물검증시험 및 영업시운전열차 운행시간대에 선로내에서 긴급작업이 필요한 경우 종합시험팀장의 승인을 받고 시운전열차 운행 여부 등 안전에 지장이 없음을 확인 후 선로에 출입하도록 관계직원(감리단, 시공사 포함) 통제 및 관련 안전조치 시행

․ 종합시험팀장은 당일 모든 시운전열차를 안전한 곳에 대피 시키는

등 시운전열차의 안전이 확보된 것을 확인 후 작업승인

․ 작업책임자는 종합시험팀장에게 열차운행 없음을 확인 후 작업에

착수하고, 작업종료시 종합시험팀장에게 작업완료 및 시설상태가

열차운행에 지장 없음을 통보 * 긴급작업 승인 요청서 : 붙임 14

- 공구별 안전관리책임자는 선로작업가능 시간대에 선로작업을 시행하고자 하는 경우 종합시험팀장에게 시운전열차 운행여부 등 안전에 지장이 없음을 확인 및 작업승인을 받은 후 선로에 출입하도록 관계직원(감리단, 시공사 포함) 통제 및 관련 안전조치 시행

* 작업완료 후 종합시험팀장에게 작업완료 및 열차운행에 지장 없음을 통보

○ 시설물 기능확보 및 장애 발생시 조치

- 분야별 안전관리자는 시설물 기능 및 성능 확보

- 종합시험기간 중 발생된 장애에 대하여 최초 발견한 종합시험관계자(기관사, 시험자 등)는 즉시(유선 또는 밴드,카카오톡 등) TTC관제사 및 종합시험팀장에게 보고후 장애현황 보고 양식 (붙임 6)으로 제출

- 종합시험팀장은 보고 받은 장애, 사고 등 이례사항에 대하여 현장안전관리자에게 통보하고, 현장안전관리자는 점검 및 조치 후 종합시험팀장에게 조치결과 통보

- 종합시험팀장은 발생된 장애에 대하여 장애현황기록부(붙임 7) 기록․관리

○ 전차선 급단전 취급

- 종합시험운행(시설물검증,영업시운전) 시간에 급단전 실시.

- 영업시운전 시행중 9호선 3단계 전구간에 대해 급단전과 이례사항 대처를 포함한 통제 및 제어는 9호선 1단계 관제센터(SCADA)에서 일괄 통제(시설물검증시험은 시운전 상황실에서 통제).

- 시스템분야 감리단 분야별 안전관리자는 9호선 3단계 구간 급단전 가능 여부를 확인하기 위한 담당자 지정․배치

- 시스템분야 감리단 분야별 안전관리자는 시설물검증시험 및 영업시운전 열차운행시간 중 단전이 필요할 경우 종합시험팀장 승인을 득하고 시행

- 급단전 가능여부 확인 담당자 임무

* 전차선로의 단전은 반드시 시운전열차 운행종료를 확인한 후 단전요청

* 급단전 여부 등에 대한 정보를 9호선 1단계 관제센터 TTC관제사에게 통보

○ 시운전열차 안전관리

- 시험자(신호담당)는 시설물검증시험 시운전열차 운행 전 시운전열차 운행에 관한 사항을 사전 협의

- 시험자(신호담당)는 탑승자 통제하며, 시험자가 탑승하지 않을 경우 시험을 중단하고 종합시험팀장에게 즉시 보고

* 승인되지 않은 자의 시운전열차 무단 탑승금지하며, 종합시험팀장 사전승인[붙임 11] 후 시운전열차 탑승

- 시험자(신호담당)는 시설물검증시험 시운전열차 고장 및 이례사항 발생 시 관계기관 연락 및 반장, 종합시험팀장에게 보고

- 시험자(신호담당)는 시운전열차 운행전 탑승자 및 지원자에게 시험개요, 시험방법, 시험과 관련된 특이사항 등을 설명

- 시험자(신호담당)는 선로상태확인, 운전취급자와 통신상태확인,

전차선 급단전상태 확인, 시험관계자 탑승확인, 시험준비 상태 확인을 한후 시험자 일지[붙임9]를 작성하여 종합시험팀장에게 매일 보고

- 현장안전관리자(공구별)는 승강장에 안전요원을 배치하여 시운전열차 안전관리 실시

○ 사고처리 및 복구

- 사고종류

․ (안전사고) 철도건설공사와 관련하여 사상자가 발생된 사고

․ (시운전사고) 시운전열차 운행관련 인명의 사상 또는 시설물의

파손 등에 대한 사고(시운전열차의 충돌, 탈선, 파손 등)

․ (시운전장애) 시운전열차 운행을 지장하는 장애(차량파손, 차량화재,

선로장애, 급전장애, 신호장애, 기능이상, 특이사항 등)

- 사고보고 및 수습

․ 종합시험운행 중 사고발생시 보고 체계에 따라 조치

․ 최초발견자는 사고 즉시 종합시험운행 안전관리자 및 TTC

관제사에게 구두(유선)보고 또는 초동보고

- 초동보고

․ 시운전열차 운행에 관련된 사고는 종합시험팀장이 보고

․ 시운전열차 운행에 관련되지 아니한 사고는 분야별 안전관리자가 보고.

- 사고보고체계

													서울시도시기반시설본부
													본부장
													도시철도국장
													사업주관국장
													도시철도설비부장
													사업주관부장 종합시험팀장
유관기관													사고현장													철도운영자
119, 112, 병원 등								필요시					건설현장의 장 (관제센터, 종합시험운행팀)								철도사고등					역, 관제실

- 사고복구반

													대책본부장
													도시철도국장
	상 황 반												복 구 반													지 원 반
	도시철도설비부장												도시철도토목부장													공구별 책임감리원 시스템책임감리원
										현장복구 지휘자
										건설현장의 장 - 책임건설사업관리기술자 - 현장대리인, 현장소장
	상 황 조									장비 동원조								인력 동원조									지 원 조
	시공사 공무담당책임자									시공사 장비담당책임자								시공사 공사담당책임자									시공사 자재담당책임자

Ⅷ		관계기관 협조사항 및 임무

8.1 서울메트로9호선운영(주), 서울9호선운영(주)

○ 시운전열차 및 승무원 충당

○ 시운전열차 운행에 따른 운전명령 처리

○ 시험운행열차 운행계획을 당일 시운전열차 기관사에 통보

○ 시험운행열차 운행은 TTC 관제사가 운전취급

○ 영업시운전열차 세부운행계획 수립·시행하고, 변경이 있을 경우 시설물검증시험 결과 보고시 별도로 추가 제출.

○ 영업시운전 안전관리(영업시운전열차 탑승관리 및 통제 등)

○ 영업시운전열차 일일운행실적을 종합시험팀장에게 제출

* 운행실적 : 운행횟수, 승무원 교육, 장애발생현황 등

○ 영업시운전 전차선 급·단전 취급(9호선 1단계 관제센터 SCADA)

8.2 918~923공구 책임감리원 및 현장대리인, 시스템분야 책임감리원

○ 장애 또는 이례사항에 대비하여 응급복구체계 유지

○ 시운전열차운행 전 선로상태, 승강장 안전확인, 출입자 통제 확인 등을 실시하고, 점검 결과를 종합시험팀장에게 제출(밴드 게재 및 팩스 이용)

○ 종합시험운행 시간에 정거장 출입 통제 등 안전사고 방지를 위하여 해당 공구의 정거장 931역 ~ 938역(상·하선)에 안전관리원 배치

○ 종합시험운행 시간에 외부 및 정거장 출입구로 외부인이 출입할 수 없게 시건장치 설치 및 통제

○ 보완사항 발생시 조치계획을 수립․조치 후 조치결과를 종합시험팀장에게 제출

○ 시운전 열차 고속주행(80km 이하)으로 비산먼지 발생으로 열차 운행 불가 및 PSD 센서 오류가 발생하면 종합시험운행을 못하게 되므로 시설물검증시험 및 영업시운전 시작전까지 해당 공구의 터널내, 승강장 물청소 실시

○ 종합시험운행(시설물검증 및 영업시운전) 시간에 터널내 송풍기 가동

8.3 서울시도시기반시설본부

○ 시설물검증시험 전차선 급·단전 취급(시운전상황실)

○ 시험자(안전관리자, 신호담당)는 탑승전 안전교육 실시 및 탑승자 명부에 서명하여 종합시험팀장에게 제출

○ 시험자(신호담당, 분야별 총괄)는 해당일 시험일지, 점검표, 증빙자료를 종합시험팀장에게 제출

○ 시험자(신호담당)는 시험중 발생한 장애, 특이사항에 대하여 장애원인 분석(장애현황, 조치내용, 조치결과, 현장사진, 도면) 및 조치결과 보고서를 작성하여 종합시험팀장에게 보고

붙임  1. 시운전열차 행로표 1부.

2. 시설물검증시험 시험항목 및 절차 1부.

3. 종합시험팀 및 지원자 명단 1부.

4. 영업시운전 시험항목 및 절차 1부.

5. 부적합 및 보완사항 조치계획서(양식) 1부.

6. 사고장애보고(양식) 1부.

7. 장애발생현황 기록부(양식) 1부.

8. 탑승자 명부(양식) 1부.

9. 시설물검증시험 일지(양식) 1부.

10. 시설물안전상태 점검결과(양식) 1부.

11. 시운전열차 탑승 승인요청서 및 승인서(양식) 1부.

12. 세부시험일정 1부.

13. 영업시운전 시행실적(양식) 1부.

14. 긴급작업요청서(양식) 1부.

15. 위험요소의 확인 방법 및 대책 1부.

16. 영업시운전 세부계획서 1부.  끝.