선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사

팀 장 : 박 영 서	☎ 8086
담당자 : 윤 갑 진	☎ 8088

□ 사업부서 : 도로계획과 (재배정 부서 : 도시기반시설 토목부)

□ 사업개요

○ 사업위치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC간

○ 사업규모 : 구조개선 폭 30m(6차로), 연장 1,100m

○ 사업기간 : 2016.03. ~ 2019.03.(36개월)

○ 총사업비 : 310억원('18년 예산 33억원<공사28억원, 감리5억원>, 기투자 58억원)

□ 추진현황 및 향후 계획

○ '17. 6.~'18. 5. : 오류IC교(사당방향) 슬라브철거 및 가시설 설치

○ '18. 6.(현재)    :  본선(시점~개봉1동사거리) 경계석 및 측구설치

오류IC교(사당방향) 교대철거

○ '19.03. : 본선 6개 차로 평탄화, 오류IC(김포방향) 교량설치, 공사 준공

□ 예산배정계획(2018년 예산)

○ 시설비

(단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계	4,153,648	1,778,647	1,000,000	1,375,001
도시안전실(도로계획과), 도로건설, 간선도로 망확충,남부순환로(개봉사거리)평탄화(도시개발특별회계) , 시설비 및 부대비, 시설비	4,153,648	1,778,647	1,000,000	1,375,001	· 시설공사 2차 기성금 및 관급자재비 지급

○ 감리비(2018년 예산)

(단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계	450,000	0	200,000	250,000
도시안전실(도로계획과), 도로건설, 간선도로 망확충,남부순환로(개봉사거리)평탄화(도시개발특별회계) , 시설비 및 부대비, 감리비	450,000	0	200,000	250,000	· 감리용역 2차 1회기성금