투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(밤고개로 확장공사 2구간(SH구간))

『밤고개로 확장공사 2구간(SH구간)』에 소요되는 관급자재를 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 밤고개로 확장공사 2구간(SH구간)

2. 연기요청 내역

품 명	규 격	납품요구번호	계약현황			납품기한
			단위	수량	납 품 자	당초	변경
석재블럭	200(175/25)x250,직선	12-17-1-86858-00	m	317	바위산업 주식회사 031-868-1111	2018.6.30.	2018.12.31.
석재블럭	200(175/25)x250,곡선	12-17-1-86858-00	m	46	바위산업 주식회사 031-868-1111	2018.6.30.	2018.12.31.

끝.

	토목부장
주무관	박현희		광역도로과장	여용석		토목부장	06/28 김영수
협조자	주무관	박상철
시행	토목부-11275	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	hyunhee07@seoul.go.kr	/	부분공개(5)