문서번호	토목부-11334
결재일자	2018.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	代이한규	06/29 김영수

밤 고개로 확장공사

- 2차 공사 발주 계획 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

도시기반시설본부

(토 목 부)

밤 고개로 확장공사

- 2차 공사 발주 계획 -

2018년 예산 배정에 따라 밤 고개로 확장공사의 2차공사 시행 방안을 검토 보고 드림

※ 18년 배정예산 5,638백만원 (공사 5,328백만원, 감리310백만원)

□ 사업개요

〇 공 사 명 : 밤 고개로 확장공사

〇 위    치 : 강남구 세곡사거리 ~ 수서ic

〇 규    모 : 폭 6차로⇒7~8차로 확장, 연장 L=1.8km

〇 총사업비 : 41,353백만원

- 공사비 24,742   감리비 1,558  보상비 13,714  설계비 1,339

〇 공사비 집행현황(계획)

(단위 : 백만원)

구 분	총괄	1차 (진행중)	2차 (금회)	3차이후	비고
계약금액	12,467	1,900	3,271	7,296	-
공 정 율	100.0%	15.2%	41.4%	100%	-
공사기간	2017.5.18~ 2019.6.30	2017.5.18~ 2018.6.30	2018.7.2~ 2019.3.31	착공일 ~ 2019.6.30	-

〇 시공사 / 감리사 : 큰빛종합건설(주)  / (주)제일엔지니어링

□ 추진경위

〇 ‘16. 03. 30 : 타당성조사 및 기본계획 용역

〇 ‘17. 03. 25 : 기본 및 실시설계 완료

〇 ‘17. 05. 17 : 공사 계약

〇 ‘17. 05. 18 : 공사 착공

□ 2차공사 시행방안

〇 공사기간 : 착공일로부터 272일간

〇 공사분야 : 토목

〇 도급금액 : 3,271백만원

〇 예산과목 : (도시개발특별회계)안전총괄본부도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 밤 고개로 확장공사, 시설비및부대비, 시설비.

〇 주요공종

- 1구간 경사면 토공사

- 산석옹벽설치, 하수도 설치

- 아스콘 포장 공사

□ 2차공사 건설폐기물처리용역 시행방안

〇 용역기간 : 착수일로부터 272일간

〇 도급금액 : 23백만원

□ 2차공사 건설사업관리용역 시행방안

〇 용역기간 : 1차 용역 종료일(2018.8.31.) 익일 부터 303일간

〇 도급금액 : 310백만원

□ 조치의견

〇 상기 2차공사 시행방안 검토결과 적정한 것으로 사료 되므로 계약부서에 붙임 설계서와 같이 공사 및 용역 계약의뢰 하여 시행코자 함.

붙 임 : 2차공사 설계서 및 발주현황 각1부.  끝.