계약금액조정 검토결과서

건 명	2017년 보라매동 외 9개동 상수도 공사(장기계속단가계약)						요청기관(부서)		남부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2018. 03. 30.					공사개요	- 상수도관(D=13~300mm, L=1,699m)
공사기간	2017.04.10. ~ 2018.06.30.						도 급 자		익제건설산업(주) 대표 박현주
심사요청(천원)							심사결과(천원)
당 초		변 경			증 감		심사대상	검 토		증 감
657,270		678,975			증)21,705		21,705	20,630		감)1,075
구 분	내 용			검 토 결 과							비 고
변경사유	○ 설계변경(제3회 최종) 보고서 (급수운영과-6157, 2018.03.30) ․ 현장 시공으로 인한 계약물량 증,감 발생 ․ 아스팔트 포장절단 등 129개소
검토내용	물량조정		○ 수량 조정(설계변경 물량 부분) ․ 터파기(기계100%)불량,보통 물량 조정 ․ 부단수 활정자관 부설 및 접합공: 150mm 1개소 조정 (사급자재 일치) ․ 안전칸막이 휀스 설치 및 철거 물량 조정								조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비, 부지임대료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람