단위과제

사회혁신 선도사업 추진

실행과제

강소전문조직중심의 PSD 국제 안전무결성수준(SIL) 인증 추진

□ 취 지

○ 승강장안전문 선도 기업으로 국내 최초 국제 안전무결성수준(SIL) 인증

추진시  시행착오 없는 단계별 인증 및 사회적 관심과 요구에 유연한

대응 필요

○ 제작사별 호선별 상이한 시설물에 의한 유지보수의 어려움으로 장애 및

안전사고 예방을 위한 전 호선의 시설물 표준화 필요

○ 승강장안전문 전면교체 시  열차운행중 철거 및 설치 작업이 시행되어

시민 및 공사작업자(직원, 업체) 안전사고 예방을 위한 안전강화 필요

□ 승강장안전문 RAMS 및 국제안전무결성수준(SIL) 인증 로드맵

1단계	’18년 1월	▶	2단계	’18년 2월	▶	3단계	’18년 4월	▶	4단계	발생시
·5개분야 핵심기술 선정 ·PSD 제작업체의 핵심기술 교육 및 위탁교육에 의한 전문가 양성 (18명)			·김포공항역 전면교체 초기공정부터 실무교육 참여 (76일) ·제작·설치 공정 핵심 기술 표준 교본 작성			· 우장산등 9역 전면교체시 RAMS 및 국제안전무결성수준(SIL)인증에 핵심 전문 조직 참여			· 시설물 노후에 의한 주요 시설물 교체시 핵심기술 보유 전문조직 주도로 시설물표준화 시행
핵심전문가 조직			핵심기술 교본화			실무 적용			시설물 표준화 완성

□ 실적 및 계획

○ 승강장안전문 핵심전문가 양성 및 조직 1단계

- 관련근거 : 승강장안전문관리단-1204(2018.2.1.)

구 분	내 용	전문가
설계전문가	PSD 전면교체 설계	3명
H/W전문가	구조체/조작반/전원장치등	6명
S/W전문가	연동제어부/RF/승무원안내장치	3명
안전성 전문가	SIL/ RAMS	3명
공정관리 전문가	공정/품질관리	3명
5개분야		18명

○ 김포공항역 승강장안전문 조기 전면 재시공 추진 2단계

- 관련근거 : 사장-690 (2017. 12. 28.)

- 기간 : 2018. 1. 29. ~ 4. 14. (76일)

- 고장발생 빈도가 높은 김포공항을 조기 전면 재시공하여 승객,직원 안전

확보

- 주요 개선내용

구 분	주요 개선내용
구조체	헤더박스내 먼지 유입 차단
	비상시 승객 탈출 통로 확보
	열차와 승강장안전문 사이 끼임사고 예방
	가동문 후면해지 손잡이 개선으로 안전성향상
	창호조립방법 개선(끼움방식)으로 유지보수 용이
제어부	장애물센서활성화로 열차와 승강장안전문 끼임사고 예방
	연동제어부 이중화 , 종합제어반 CPU고장시 실선운영
	ATO,RF장애시 전동차 출입문과 연동하여 안전성 확보
	승무원안내장치 LED로 장애예방, 유지보수용이
	스크류형태의 구동부로 출입문 개폐 정확도 향상

- 승강장안전문 핵심전문가 현장 실무교육 시행

· 공정관리교육 (주1회, 월1회 총13회)

: 18명*13회 = 234명 (누적인원)

· SIL인증 교육 (2일), 10명

○ 제작·설치 공정 핵심 기술 표준 교본 작성 2단계

- 관련근거 : 승강장안전문관리단-20511(2018.6.5.)

- 김포공항역 승강장안전문 조기 전면 재시공 배경, 철거

및 설치 표준매뉴얼 제작 ( 159페이지 )

- 향후 승강장안전문 재시공 시 매뉴얼 활용

○ 구조진단 및 재시공 공정관리 및 SIL인증(TF) 업무 추진계획 수립  3단계

- 관련근거: 승강장안전문관리단-3999, 승강장안전문관리단-4000(2018.4.16.)

- 대상 :  ②호선(3역)성수, 방배, 신림역, ③호선(1역)을지로3가역, ⑤호선

(4역)김포공항,광화문,왕십리, 군자역

- 기간 : ‘17.10.25.~‘19.04.18.(540일)

- 국내최초 국제 안전무결성수준(SIL) 인증 및 RAMS적용 승강장안전문 전면

재시공을 위한 업무 전문화 실시

- 핵심 전문 조직 중심의 참여로 단계별 국제인증, 현장감독, 안전관리에

만전을 기하여 원활한 사업진행기여

□ 예산 및 추진일정

예산과목	연 도	2018년	2019년
운수사업,자체,여객운송활동비(지출)	소요예산(천원)	15,000
선로설비,시설비 및 부대비,시설비	소요예산(백만원)	5,424 / 8역	11,853 / 8역
추진일정		⦁핵심기술전문가 양성 - 기간:‘18년 2월 ~ 12월 ⦁전면교체 공사 - 기간:‘17.10.25.~‘19.04.18.(540일)

□ 공사기간중 안전확보를 위한 타부서 협업 체제 구축

구 분	부서	협업 내용
홍 보 (7개부서)	역사지원처	역사 안내방송
	홍보실,부대사업처	전역사 행선안내게시기 홍보 열차 객실 안내표시기 홍보
	승무운영처,승무지원처	열차도착전 열차 자동 안내방송, 기관사 안내방송
	종합관제센터	PSD 설치 관련 ALL-CALL방송
	홍보실	대외 언론홍보 지원
안전 (10개부서)	고객안전처,역사지원처	지하철보안관 및 공익요원 순찰강화
	부대사업처,역사지원처	감독자등 임시사무실 확보
	승무·차량계획처 종합관제센터	공사역 진출입 열차 서행운행, 열차운행 통제 및 관제방송 시행
	기술계획처	인력지원 등
	궤도처,장비단	모터카, 트롤리 대여 및 선로사용 협조