문서번호	설비부-10002
결재일자	2018.7.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	07/19 권오식
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 통신공사』

설계변경(총차4회, 3차1회)검토보고

2018. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 통신공사』

설계변경(총차4회, 3차1회) 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 통신공사 』 경찰청 연계형 비상벨 설치 실정보고 승인한 사항에 대하여 설계변경 서류가 제출되어 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 통신공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 터널 320m

□  시 공 사 : *******

□ 공사금액 : *********************

□ 공 정 률 : 20%(토목공사 58%)

2		추진경위

□ 토목부-24412(`17.11.22): “방범시설 설치 협조 요청”

‣ 방범시설(비상벨) 혜화경찰서와 연계 요청

□ 율곡감 제2017-296호(`17.12.19): 건설사업관리단 “비상벨 설치 검토보고”

□ 설비부-21969(`18.12.28): 비상벨 설치 승인 통보

□ 한해기 제2018-289호(`18.7.12): 건설사업관리단 설계변경 보고

3		설계변경 내용

□ 보도박스(L=320m) 2개소에 경찰청 연계형 비상벨 설치

○ 종묘측 보도박스 6개 설치 완료하여 운영 중

○ 창경궁측 6개는 보도박스 공사 완료시점인 `18.12월에 설치 예정

□  변경사유

○ 관할 혜화 경찰서에서 “경찰청 연계형 비상벨 설치” 권고가 있었으며,

○ 보행자 통로박스의 길이(320m)가 길어 야간 통행 시 여성 보행자로부터          위험하다는 민원 지속 제기되어 시민 안전을 위하여 설치.

□  변경금액

○ 변경내역

공종	변경내역	변경금액
******* **	***************** ********** ********** **************	**********
*****		**********
***********		*********
***		**********

○ 계약금액 변경 내용

구분	계약금액		증감액
	변경 전	변경 후
3차수	*************	*************	*************
총차	************	************	*************

4		보고자 의견

□   기 실정보고 승인에 따른 건설사업관리단의 설계변경 검토보고 내용이 적정         하다고 판단되므로 계약부서에 설계변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1)건설사업관리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서 1부.

3)제비율 검증확인서 1부.끝.