1. 충신동 1-66번지 실외기 위치 변경

◯ 현황 및 사유

1) 2층 실외기 배관작업 완료하였으나 건축 단열시공 등의 원인으로 기존 설계 위치에 시공이 불가능하여 배관을 옥상으로 연장

2) 민원(사생활침해)으로 옥상 실외기 위치를 옥상에서 2층 계단실로 변경

충신동 1-66 번지
변경 전 (2층)	변경 후 (2층)

2. 충신동 1-232번지 실외기 위치 변경

◯ 현황 및 사유

1) 1, 2층 냉매배관은 설계위치에 실외기 설치가 부적합하여 배관을 옥상으로 연장

2) 시스템 실외기 위치는 민원 예방을 위해 2층 옥상 난간 뒤편으로 이동

충신동 1-232 번지
변경 전(2층)	변경 후(옥상)

3. 충신동 1-239번지 실외기 위치 변경

◯ 현황 및 사유

1) 1층 실외기 배관작업 완료하였으나 기존 설계 위치는 공간이 협소하여 건물 측벽으로 이설

2) 1, 2층 냉매배관 작업 완료하였으나 기존 설계 위치는 공간이 협소하여 옥상으로 배관 연장

충신동 1-239 번지
변경 전(1층)	변경 후(1층)
변경 전(2층)	변경 후(옥상)

4. 충신동 1-136번지 실외기 위치 변경

◯ 현황 및 사유

- 1층 실외기 배관작업 완료하였으나 기존 설계 위치는 공간이 협소하여 건물 뒤편 외벽으로 이동

충신동 1-136 번지
변경 전	변경 후

5. 충신동 1-198번지 실외기 위치 변경

◯ 현황 및 사유

1) 천정배관 완료로 배관작업 2대분 신규설치

2) 실외기 배관 옥상으로 연장 설치

충신동 1-198 번지
변경 전(2층)	변경 후(옥상)