서울특별시고시 제2018-232호

도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가

1. 양주 별내지구 광역교통개선대책의 일환으로 서울특별시 노원구고시 제2011-61호(2011.12.8.)로 도시계획시설(도로) 경미한 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2015-53호(2015.02.26.)로 실시계획인가, 서울특별시고시 제2017-65호(2017.03.02.)로 실시계획(변경)인가, 서울특별시고시 제2017-485호(2017. 12.28.) 로 실시계획(변경)인가된 『남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사』에 대하여 서울특별시공고 제2018-1514호(2018.06.28.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가를 위한 열람공고를 시행하였기에

2. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조 및 시행령 제97조에 따라 실시계획 변경인가하며 같은법 제91조 및 시행령 제100조에 따라 이를 고시하고자 합니다.

2018년  07월 26일

서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 일원 (변경없음)

○ 시점 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-69 (가스충전소)

○ 종점 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 (서울시계)

나. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

○ 종 류 : 도시계획시설(도로)사업

○ 명  칭 : 남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사

다. 사업시행 규모 (변경없음)

○ 폭 38→42m, 연장 323m, 면적 18,215㎡

라. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

○ 성 명 : 한국토지주택공사장

○ 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

마. 사업의 착수 및 준공 예정일 (변경)

- (당초) 실시계획인가 고시일(2015. 02. 26.) ~ 2018. 06. 30.

- (변경) 실시계획인가 고시일(2015. 02. 26.) ~ 2018. 09. 30.

바. 자금조달방안 : 붙임2 (변경없음)

사. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 붙임1 (변경없음)

아. 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한사항 : (변경)

- (당초) : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제99조에 의함. 단, 사업시행자는 준공 전에 관련 지방자치단체간 협의를 통하여 시설물 관리청 등을 명확히 하여야 하며, 시설물을 관리청에 인수인계 전까지는 사업시행자가 유지관리 시행함.

- (변경) : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제99조에 의함.

자. 기타 자세한 사항은 한국토지주택공사 서울지역본부 남양주사업단 (☎031-528-5474), 서울특별시 도로계획과(☎02-2133-8087)에 문의하시기 바랍니다.